＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	계약심사 결과 정정요청에 대한 회신

1. 토목부-16342(2017.08.03, 계약심사 결과 정정 요청)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 계약심사결과 정정요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

- 아   래 -

가. 당초 설계변경심사요청 금액(10,365,521천원)중 발파패턴변경 해당금액

(8,419,180천원)은 설계변경심사 대상금액에서 제외하고 잔액(1,946,341천원)에 대하여 설계

변경심사 후 결과를 통보하였음.

(단위:천원)

심사요청금액	심사요청조정금액	심사금액	절감액	비 고
10,365,521	1,946,341	1,501,839	444,501

나.  발파패턴변경금액 제외사유: 계약심사과-11852호(2017.06.20, 첨부 참조). 끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	신정		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	전결 08/11 안호
협조자
시행	계약심사과-15139	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	2133-3329	/전송	2133-1032	/		/	대시민공개