문서번호	도로보수과-5164
결재일자	2017.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이화신		代이화신	05/26 신응수
협조

폐아스콘 운반 및 처리용역 추진 계획

2017.  5.

북부도로사업소

(도로보수과)

폐아스콘 운반 및 처리용역 추진 계획

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 폐아스콘 운반 및 처리용역(2017년 노후포장도로정비공사-1구역)

- “노후포장도로정비공사-1구역”에서 발생하는 폐아스콘 운반 및 처리

○ 규    모 : 폐아스콘 운반 및 처리 20,210톤

□ 추진경위

○ 발 주 일 : 2017.3. 3 (공고 2017.3.7.  개찰 2017.3.15.)

- 적격심사 점수 미달로 유찰

- 10개 업체 입찰참가, 5개 업체 적격심사 실시(5개 업체 낙찰하안선 미달)

○ 폐아스콘 운반 및 처리용역 추진사항 보고(도로보수과-3866, 2.17.4.14)

- 폐아스콘 평균 운반량을 “100톤/일”으로 완화하여 재공고

○ 재공고 요청 : 2017.4.14.(공고 2017.4.25.  개찰 2017.5.12.)

- 유찰 : 응찰업체 없음

○ 3차공고 : 2017.5.12.(공고 2017.5.12.  개찰 2017.5.26. 13시)

- 유찰 : 단독응찰

□ 문제점 및 대책

○ 최근 폐아스콘 발생량에 비하여 재생아스콘 사용량이 상대적으로 감소하여 서울 및 경기권 소재 폐기물처리 업체에 폐기물이 다량 적치되어 있기 때문에 추가로 폐아스콘을 받을 여력이 부족함

○ 노후포장도로 정비공사에서 발생하는 폐아스콘 양이 많기 때문에 소규모(약간의 추가 여력이 있는) 업체는 입찰 참가가 어려움

○ 현재 우리사업소에서 반출 예정인 폐아스콘 전체를 단시간에 반입하기 어려우나 추후 반입여력이 생길수 있는 업체를 선정하여 폐아스콘을 운반 및 처리하고자 함

※ 처리업체 처리능력 부족시 대책 : 폐아스콘 처리업체 추가 지정 (업무 협약 등)

□ 계약 추진 계획

○ 계약업체

- 운반 : (유)도성개발

- 처리 : (유)도성개발(5,210톤), 소원아스콘 ㈜(15,000톤)

○ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당자사로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 제1항

- 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립되지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우

□ 행정사항

○ 변경계약 의뢰 : 관리단속과.

붙  임 : 용역계약 유찰 통보 1부.  끝.