투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	시설과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 알림[엘리베이터 구매 설치(조달 구매)]

1. 시설과-4425(2017.8.9.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서로부터 변경계약 요청된「엘리베이터 구매 설치(조달 구매)」건에 대하여 내용 검토한 바 타당하다고 판단되므로 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드립니다.

가. 건    명 : 엘리베이터 구매 설치(조달 구매)

나. 변경계약 체결일자 : 2017. 8. 11.

다. 계약업체 : 서울지방조달청(납품업체 : 주식회사 트라비스엘리베이터)

라. 계약방법 : 조달구매(제3자단가 구매)

마. 변경요청내용

구분	변경 전	변경 후	변경내용
납품기한	’17. 8. 14.	’17. 8. 31.	증 18일
과업내용	엘리베이터 제작·설치	엘리베이터 제작·설치	-
계약금액	37,454,370원 (※조달수수료별도)	37,454,370원 (※조달수수료별도)	-

바. 변경사유 : 현재 설치되어 있는 엘리베이터 철거 공사 준공 기한(’17.8.31.)과 연계하여 신규 엘리베이터의 납품 및 설치 일정을 맞추기 위해 납품 기한 연장에 따른 변경계약 체결

붙임 : (변경)분할납품요구및통지서 1부. 끝.

	경영지원부장
주무관	김선희A		주무관	조재영		총무과장	代김기용		경영지원부장	08/14 송임봉
협조자
시행	총무과-9569	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)