함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	시립종로청소년수련관 계획설계용역 계약 변경 의뢰(2차)

1. 청소년정책과-2793호(2017.8.16.)와 관련입니다.

2. 시립종로청소년수련관 계획설계용역에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경 계약 내용

구분	당 초	변 경	변경 사유
용역기간	********** *********************	********** **********************	· 도시계획시설 결정 입안도서 작성 후, 市 도시계획 관련부서 사전 협의 기간 소요로 市 도시계획위원회 심의 상정 연기(’17.7→9) · 市 도시계획위원회 심의 가결 전까지 설계 보완 요청사항 처리로 인해 과업기간 연장

붙 임 : 1. 계약 변경 계획서(2차) 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.

	청소년정책과장
주무관	차인석		청소년시설팀장	최형대		청소년정책과장	08/21 이창석
협조자
시행	청소년정책과-3040	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동, 서울시청 서소문별관)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4126	/전송	02-768-8829	/		/	부분공개(5)