투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	(주)성현이엔씨
(경유)
제목	도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 3차 작업내역 변경

1. 도로보수과-8826호(2017.08.21.) 관련입니다.

2. 2017년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가) 3차 작업지시 건에 관하여 작업 수량변동사항을 반영하여 변경하오니 공사시행에 만전을 기하여주시기 바랍니다.

가. 작업지시 내용

ㅇ 공 사 명 : 2017년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 시공회사 : ㈜성현이엔씨 대표 유 지 화

ㅇ 작업지시 차수 : 제3차

ㅇ 작업기간 : 2017. 07. 21. ~ 2017. 08. 31.

ㅇ 변경내역

연번	위치	작업내용	규격 및 지시물량		개략 공사비 증감액 (원)	비고
			변경 전	변경 후
1	강서로, 화곡고가 하부 U턴구간 진입도로	과속방지턱(이미지형) 설치	0㎡	12.6㎡	증) 407,586	추가작업
2	신월로, 신정이펜하우스 2단지 앞	중앙분리대 철거	150m	0m	감) 1,582,627	작업보류
3	신월로, 신정이펜하우스 2단지 앞	충격흡수시설 철거	2개	0개	감) 2,008,491	작업보류
4	경인로, 영등포역 앞	무단횡단금지시설 철거	0경간	75경간	증) 6,520,174	추가작업
5	경인로, 영등포역 앞	무단횡단금지시설 재설치	0경간	75경간	증) 3,051,161	추가작업
6	경인로 363, 개봉역 인근	무단횡단금지시설 철거	0경간	25경간	증) 2,172,702	추가작업
7	경인로 363, 개봉역 인근	무단횡단금지시설 재설치	0경간	25경간	증) 1,016,363	추가작업
8	신목로, 목동 힘찬병원 앞	무단횡단금지시설 재설치	0경간	14경간	증) 568,711	추가작업
9	가마산로, 광명대교 진출입 토공부	폐콘크리트	0t	100t	증) 2,772,700	추가작업
총 개략 공사비 증감액					증) 12,918,279

붙임 : 변경 작업지시서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김경욱		도로보수과장	08/21 김권일
협조자
시행	도로보수과-8829	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동) 강서도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2657-7953	/전송	02-2657-7960	/	simplekw@seoul.go.kr	/	대시민공개