★

문서번호	도로과-16202
결재일자	2017.8.23.
공개여부	대시민공개

담 당	도로조명담당	도로과장		안전건설교통국장		부구청장
손영일	박종식	최광천		박형중		08/23 김병환
협 조

정릉지역 전통문양 등기구 설치 계획

2017.  8.

안전건설교통국

(도 로 과)

정릉지역 전통문양 등기구 설치 계획

2017년도 주민참여예산으로 선정된 정릉지역 전통문양 등기구   설치계획을 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		목적 및 필요성

❍ 유네스코 세계문화유산인 정릉에 대한 인식제고와 역사문화의식 함양

❍ 정릉 방문객 증가를 통한 지역경제 활성화

❍ 전통문양 등기구 교체로 도시미관 향상 및 보행환경 개선

Ⅱ		제안내용

❍ 사업제안자 : 이화승(정릉2동 주민)

❍ 제안내용 : 세계문화유산에 걸맞는 가로등으로 교체 요망

※ 2017년 구 주민참여예산으로 선정

❍ 확정예산 : 80,000천원

Ⅲ		설치개요

❍ 사 업 명 : 정릉지역 전통문양등기구 설치

❍ 설치기간 : 2017. 9. ~ 2017. 10. 30.

❍ 위치 및 내용 : 정릉주변 3개 지역, 전통문양등기구 66등 설치

❍ 지역별 설치형태

지역	설치위치	설치방법	설치수량	비고
1지역	아리랑로19길 (정릉역2번출구~정릉)	한전주에 전통문양 등기구 설치	32등	디자인 #1
2지역	아리랑로 (정릉역주변)	기와진회색 가로등주로 교체 전통문양등기구 보행등 설치	14등	디자인 #2
3지역	정릉로 (정릉2동주민센터주변)	기존 기와진회색 가로등주에 전통문양등기구 보행등 설치	20등	디자인 #2

❍ 설치위치도

Ⅳ		설치방법 및 소요예산

❍ 설치내역 : 보안등기구 교체 32등, 보행등기구 설치 20등,

가로등주 교체(보행등기구 포함) 14본

※ 정릉역주변 가로등주 7본은 우이-신설 도시철도에서 설치후 기부체납 예정

❍ 소요예산 : 80,000천원

- 자재비(68,000천원)

: 전통문양등기구 66등, 가로등주 7본, 정릉안내표지 66개

- 설치비(12,000천원)

: 2017 가로등 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시

Ⅴ		추진일정

❍ 2017. 8. 7. : 제안자,정릉2동장,도로조명팀 관계자

디자인(안) 및 설치위치 협의

❍ 2017. 8.   : 세부적인 디자인 내용 도시재생디자인과와 협의

❍ 2017. 9.   : 자재발주(조달청3자단가)

❍ 2017. 10.  : 작업지시 및 설치완료

붙임 : 전통문양등기구 디자인(안) 1부. 끝.