- 우이천 외 2개소 준설공사 -

준공기한 연기검토 보고

우이천외 2개소 준설공사 추진 중 발생한 현안사항에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사개요

○ 공 사 명: 우이천외 2개소 준설공사

○ 공사기간: 2017. 6. 09. ~ 2017. 8. 30.

○ 공사위치: 우이천, 가오천, 백운천, 송천빗물펌프장 내 집수정

○ 도 급 비: 119,048천원

○ 도 급 자: 신한엔비텍(주) 대표 신병철

○ 공사개요:

- 하천준설: V=2,400㎥ 복개준설: V=180㎥, 흡입준설: V=22㎥

2. 연기사유 및 검토의견

○ 본 공사는 6. 09. 계약체결되어 추진중에 있으나 공사기간중 46일을 우천으로 정상적인 공사추진이 불가능 하여 공사기간이 절대적으로 부족하여 계약 기간내 공사완료가 어려운 실정으로 2017. 9. 25.까지 준공기한을 연기하고자 함.

- 강우일수: 총 46일

·6월: 9일(6,7,10,13,24,25,26,27,28일)

·7월: 21일(1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,27,28,29,31일)

·8월: 16일(1,6,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28일)

3. 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 부족한 절대공기(46일)에 대하여는 사업의 원활한 추진을 위해 준공기한을 연기하여 향후 사업추진에 만전을 기하고자 함.

- 준공기한

·당    초: 2017. 8. 30.

·변    경: 2017. 9. 25.

- 지체상금 부과여부: 미부과

·귀책소재: 강북구청

○ 우리구 재무과(계약부서)에 준공기한 연기의뢰 조치코자 함.

4. 향후계획

○ 2017. 8.: 공사 준공기한 연장계약.

○ 2017. 9.: 공사 준공.  끝.

2017.   8.

보고자: 지방시설주사보   김 홍 균

결재	주무관	치수팀장	안전치수과장	건설안전교통국장
	김홍균	이광철	함명수	전결 08/29 김희동
협조