문서번호	버스정책과-5915
결재일자	2017.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정류소관리팀장	버스정책과장
강설영		이희신	08/29 김정윤
협조

2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업

건설폐기물처리용역 준공기한 연기 검토보고

2017. 8.

도시교통본부

(버스정책과)

2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업

건설폐기물 처리용역 준공기한 연기 검토보고

2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 추진 중 우기로 인한 토목공사 일정지연에 따라 건설폐기물 처리용역 준공기한을 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 건설폐기물 처리용역

○ 용역목적

- 서울특별시에서 시행하는 2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사(무장애정류소 및 디자인승차대 설치) 시 발생되는 폐기물(폐아스콘, 폐콘크리트 등)을 폐기물관리법에 의하여 건설폐기물처리업허가를 받은 자와 용역시행 함으로서 폐기물의 부적정 처리를 방지하고 예산의 적정 집행을 기하고자 함.

○ 용역내용

- 발생위치 : 21개구 45개소

- 처리대상 : 가로변정류소 이용환경 개선공사 대상지 45개소에서 발생되는 폐아스트, 폐콘크리트 등 건설폐기물

- 발생예정량 : 폐기물처리 699톤, 폐기물운반 303㎥

· 폐기물처리 : 폐아스콘(112톤), 폐콘크리트(587톤)

· 폐기물운반 : 303㎥

○ 계약내역

공사명	계약상대자	계약금액	계약일자	착공일자	준공일자
2016년 가로변 정류소 이용환경 개선공사 건설폐기물 처리용역	주식회사 태영테크 대표 홍성권	금21,829,500원	2016. 12. 14.	2017. 3. 2.	2017. 8. 30.

□ 준공기한 연기 검토

○ 연기사유 : 우기로 인한 토목공사 일정지연에 따라 폐기물처리용역도 준공연기 필요함

○ 준공기한 연기내역

공사명	준공기한		연기 일수	귀책사유
	당초	변경
2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 건설폐기물 처리용역	2017. 8. 30.	2017. 9. 15.	16일	서울특별시

□ 조치계획

○ 변경계약의뢰(재무과) : ’17. 8. 29.

○ 공사준공 : ’17. 9. 15.  끝.