문서번호	도로보수과-8643
결재일자	2017.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이화신		김학동	08/31 신응수
협조

광화문광장 차도구간 정비공사 추진 방안

2017.  8.

북부도로사업소

(도로보수과)

광화문광장 차도 정비공사 추진방안

서울시에서 추진중인 “광화문광장 재구조화”사업에 따라 사업이 취소된 “광화문광장 차도구간 정비공사-2차” 추진 방안에 대하여 보고 드림

□ 관련근거

○ 광화문광장 차도 정비계획 회신 : 도로관리과 –13458(2017.8.14.)

- 도급 범위내에서 노후포장도로 정비공사로 변경 추진

○ 자전거도로 유지보수공사 협조요청 : 자전거정책과 –9732(2017.8.)

- 청와대앞길 개방에 따른 자전거 도로 설치(도로포장, 미끄럼방지포장, 표지병설치 등)

- 도로재포장 소요예산 250백만원 재배정 완료

□ 공사개요

○ 공 사 명  : 광화문광장 차도구간 정비공사-2차

○ 위     치 : 세종로(세종문화회관~경복궁)

○ 규     모 : 아스팔트포장 134a

○ 사 업 비 : 450백만원

※ 청와대로 자전거도로 정비 예산 추가 재배정 : 250백만원(자전거정책과)

□ 추진경위

○ 2017.3.17. : 공사 계약 및 착공

- 도급공사만 계약 완료 (폐기물 처리 용역 및 자재구매는 발주 취소함)

- 도급업체 : 은진이엔씨(주) 대표 이수일

- 계약금액 : 442.698,000원

○ 2017.3.29. : 슈퍼데스크 논의

- 광화문광장 재구조화 마스터플랜 발표(8월 예정)이후 일괄정비 추진

- 기 발주된 1차 공사로 파손부위 부분보수 시행 및 2차 공사 보류

○ 2017.8.3. : 광화문 차도 정비계획 회신

- 도급 범위내에서 노후포장도로 정비공사로 변경 추진

□ 추진계획

○ 광화문광장 차도구간 정비공사를 노후포장공사로 전환하여 공사를 추진

도로명	공사구간	차로	폭(m)	연장(m)	포장면적(a)	소요예산(백만원)
율 곡 로	원남사거리~이화사거리	6	20	420	84	160
삼청동길	삼청터널~정암아트갤러리	2	6	980	58	110
청와대로	자하문길~삼청동길	4	16	1,080	172	330
동 일 로	화랑로~의정부시계		5	300	15	100

○ 자전거도로 재포장 공사는 광화문광장 차도구간정비공사에 포함하여 시행

- 청와대 앞길 개방 일정에 맞추기 위하여 조기 재포장 필요

※ 공사추진 일정(자전거정책과 추진계획)

8.30.~9.2.		9.6.~9.8.		9.13.~9.15.
효자로 (차선재도색,미끄럼방지, LED표지병설치)		청와대로 (노후포장도로정비공사)		청와대로 (차선도색,미끄럼방지, LED표지병설치)

○ 부대사업 추진 계획

- 폐아스콘 운반 및 처리용역 : 페아스콘 운반 및 처리용역(1구역)에 포함하여 시행

- 차선도색      : 교통안전시설 설치공사에 포함하여 정비

- 관급자재 구매 : 조달구매 (WC-3, 4,000톤)

□ 향후 계획

○ 공사 시행후 설계변경 및 정산.

따로붙임 : 위치도 1부.   끝.