문서번호	방재시설부-15190
결재일자	2017.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	방재시설과장	방재시설부장
이석근	이도헌	08/31 남궁용

공유회의 결과보고(2차)

▷남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)◁

2017. 08. 29.

도시기반시설본부

방재시설부

공 유 회 의  결 과 보 고 (2차)

▷남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)◁

○ 일  시 : 2017. 8.29.(화) 14:00~15:00

○ 장  소 : 도시기반시설본부 방재시설부 회의실(청계별관 14층)

○ 참석자 : 방재시설과장외 18명

○ 내  용

▷ 설계내역서 세부적인 검토 필요

- 감리단, 시공업체에서 검토중임

▷ 지장물 이설에 따른 유관기관 회의 준비

- 2017.8.30. 개최예정임.

▷ 소방본부 리모델링에 따른 구조물 보강방안 재검토(RC→강구조)

- 영구성을 감안하여 기존 RC구조로 추진(설계사 구조검토결과 반영)

▷ 신설도로 개설전 신호등, 표지판 등 교통시설 설계 및 협의필요

- 신설도로 공사 착수 시 추진예정.

▷ 지열시스템(27공) 설치에 따른 시공계획 사전 검토

- 사업장내 토공작업시 협의하여 착수예정(Ø150mm, H=DIR 200m 시굴)

▷ 공사여건상 8월말 완료는 불가하며 2018.12월까지 확보된 예산 소진

- 공공재생과에서 2018.12월까지 완료될 수 있도록 연기방침 수립예정.

▷ 소방재난본부앞 도로개설 후 기존 도로 차단 및 우회에 따른 교통

협의 조속처리가 필요함.(공사중 교통소통처리 시급)

- 설계업체(용역)에서 시공업체,감리단 시공단계 협의 작성예정임.

▷ 소방재난본부 주차장 철거에 따른 식당운영방안 검토 필요

- 건축부,공공재생과,재난본부와 인근 식당 이용방안 협의중임.

▷ 공사 착공 전 비산먼지 및 특성공사 신고 등 사전 행정절차 이행

- 시공업체에서 2017.8.31. 착공계 제출후 관할구청 신고예정임.

▷ 지하매설물 이설로 인해 수반되는 도로점용 굴착복구허가 사항은 관련

규정에 의거 허가가 불가하나 공사완료 후 인근 도로 전폭포장을 해야

함에 따라 중구청과 별도 협의 필요

- 중구청 도로과에 굴착허가 협조요청 하였음.(방재시설부-14868,‘17.8.25)

▷ 중정6국 철거 및 기억6 사업에 대한 공사관계자 교육일정 협의

- 현장사무실 설치, 하도급계약후 2017.9월 하순 추진예정임.

▷ 소방재난본부 주차장 철거에 따른 사업계획 설명이 필요.

- 재난본부 식당운영방안 협의완료 후 사업설명예정임.

▷ 매주 시행되는 공유회의 일자 확정 : 매주 화요일 14:00

- 공사착수 후 진행이 안정될때까지 운영예정임.

▷ 년말까지 공사추진 공정표 작성 필요

- 감리단,시공업체에서 설계도서 세밀 검토 후‘17. 9. 8일한 제출예정임.

▷ 소방재난본부 리모델링관련 인허가 절차 이행여부

- 현재 추진중으로 리모델링공사 착수전 이행완료.

▷ 주차장 철거전 하부 파이프 서포트 설치안 변경검토

- 파이프 서포트를 강재(H-Beam)서포트로 변경예정

○ 조치계획

- 3차 공유회의시 소방재난본부(방재센타) 담당자 참석요청

- 소방재난본부 리모델링 예정공정표 작성 보고(감리단,시공업체)

- 2017.12월말까지 공사추진안 검토보고(감리단,시공업체)

- 설비부 담당자 필요시 회의참석조치

붙임 1)소방재난본부 식당운영방안 검토서(공공재생과) 1부.

2)전경사진 및 참석자 명단(2차) 1부.  끝.