투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	전시과장
(경유)
제 목	용역변경계약 체결 통보[기획전시실 전시환경 개선공사 실시설계 용역]

1. 전시과-3044호(2017. 8. 31.)호와 관련 입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결되었음을 알려드리니 참고하시기 바라며, 아울러 기한내 준공신고서를 제출하여 지연배상금이 부과되는 일이 없도록 업체에 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 건     명 : 기획전시실 전시환경 개선 공사 실시설계 용역

나. 계약업체 : 건축사사무소 강희재(대표 : 강성원)

다. 계약금액 : 금34,500,000원(변경없음)

라. 계약기한 : ’17. 7. 25. ~ 9. 2. ➡ ’17. 7. 25. ~ 9. 12.(증10일)

마. 변경사유 : 발주기관의 귀책사유

- 용역 자문회의 결과, 실시설계 개선방안에 대한 전문가 자문의견을 성과품에 충실히 반영하고자 기간연장

바. 변경계약일자 : 2017. 9. 1.

붙임 : 용역변경계약서 등  1부.　끝.

	총무과장
주무관	조재영		총무과장	09/01 양성호
협조자
시행	총무과-10316	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr
전화	02-724-0117	/전송	02-724-0241	/		/	부분공개(6)