문서번호	계약심사과-16418
결재일자	2017.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		토목심사팀장	계약심사과장
서연우		代김경근	09/04 안호
협 조
	방재시설부장			代이도헌

「국회대로 지하차도 및 상부공원화사업」 계약심사 처리기한 조정 검토 보고

2017. 9.

계약심사과

「국회대로 지하차도 및 상부공원화사업」

계약심사 처리기한 조정 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업」에 대한 계약심사 처리기한 연장을 추진하여 계약심사 업무 추진에 만전을 기하고자 함.

- 처리기한 : 10일 → 20일(10일 연장)

Ⅰ		관련 근거

□ 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제7조 제1항 단서조항

다만, 계약심사기간 연장이 필요한 경우에는 발주부서의 장과 협의하여 계약심사기간을 조정할 수 있다.

Ⅱ		계약심사 요청내용

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업(1단계 중첩구간) 건설공사

○ 공사내용 : 지하차도 구조물 신설 L=415.0m(4차로)

○ 사 업 비 : 326억원(계약방법 : 수의계약)

○ 발주부서 : 도시기반시설본부(방재시설부)

□ 진행현황

○ ’17. 8. 02 : 계약심사 요청 및 접수

○ ’17. 8. 04 : 계약심사 서류보완 요청

○ ’17. 8. 24 : 계약심사 서류 보완자료 제출

□ 검토대상 설계도서 물량

○ 설계도면, 공사시방서, 구조계산서 등 7권 8,626페이지

Ⅲ		검토의견

○ 당해 공사는 현재 진행중인 민자사업(제물포 터설공사)과 공사구간이 중첩되는 등 설계도서에 대한 검토사항이 많은 300억 이상 대형공사로서

○ 다수의 계약심사가 동시에 진행되는 여건에서 처리기한 10일내 처리는 어려워 심도있는 원가심사를 위하여 계약심사업무처리규칙에 의거 20일로 조정(연장)하고자 함

※ 검토과정에서 원가분석자문위원회 개최 필요시 소요 일수 증가

Ⅳ		향후일정

○ ’17. 9. 15 : 계약심사 결과 사전협의.

○ ’17. 9. 20 : 계약심사 결과 통보.  끝.