문서번호	시설보수과-7872
결재일자	2017.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	09/06 한동근
협조
	주무관		代배종우

「2017년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사」

설계변경(제1회) 검토 보고

2017. 9

서부도로사업소

(시설보수과)

「2017년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사」

설계변경(제1회) 검토 보고

「2017년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사」와 관련하여 작업지시에 따른 신규공종 반영 및 시공물량 증·감에 대한 설계변경(제1회) 검토 보고임.

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사

○ 대상시설 : 30개소 (터널 6, 복개 12, 지하차도 12)

○ 공사기간 : 2017. 3. 28 ~ 2017. 12. 31

○ 계 약 자 : 해승건설㈜ 대표 장영숙

○ 총공사비 : 1,268백만원 (도급비 1,144, 관급비 98, 이설비26)

○ 공사규모 : 아스콘포장 100a, 콘크리트 단면보수 361㎡, 표면보수 2,209㎡, 균열보수 215m, 신축이음보수 317m 등

Ⅱ

주요 추진경위

○ 2017. 2월 : 공사 발주

○ 2017. 3월 : 공사계약 및 착공

○ 2017. 4월~8월 : 1~8차 작업 시행(공정율 약70%)

- 작업완료 : 1차(해빙기 등), 3차(3호터널 관리실보수), 4차(금화터널 포장), 5차(정기점검 등)

- 작 업 중 : 2차(홍제천3,4,5복개 보수), 6차(금화터널 교통안전시설), 7차(민원/순찰 등), 8차(퇴계로지하차도 포장)

Ⅲ

설계변경 내용(계약금액 변경 없음)

○ 작업지시/완료에 따른 시공물량 증·감 반영

- 아스콘 포장 : 100a → 111a (증11a)

- 단면보수 : 361㎡ → 1,498㎡ (증1,137㎡)

- 표면보수 : 2,209㎡ → 1,140㎡ (감1,069㎡)

- 균열보수 : 215m → 50m (감165m)

- 신축이음 보수 : 317m → 85m (감232m) 등

○ 작업지시에 따른 신규공종 반영

- 남산3호터널 풍도 내 유도배수 동판 설치(STS,간단) 반영(1차)

- 남산3호터널 관리실 창호 제작 설치 반영(3차)

- 신원미상 교통사고에 따른 충격흡수시설 파손 재설치 반영(5차)

- 수방대비 지하차도 집수정 준설 및 청소 반영(5차)

- 금화터널 교통안전시설(도로전광판) 반영(6차) 등

Ⅳ

조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 작업지시/완료에 따른 시공물량 증·감 및 신규공종을 반영하여 설계변경(물량변경) 시행코자 함.

Ⅴ

향후계획

○ ‘17. 9~12월 : 하반기 정기점검, 민원/순찰 등 시설물 유지관리에 따른 작업시행

붙임 : 설계변경(제1회) 내역서 1부.  끝.