		계약번호		제12132036600호				자료번호
		문서번호						개정번호		Rev. 0
서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업
주전송설비 3단계절체계획서
	제출목적					2017. 07. 31
			기성신청
			검토/승인
			설계변경
			기본설계준공			확인		작성자	검토자		승인자
			실시설계준공
			시공준공
	○		기타보고용 등

	서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업 주전송설비 공장검수계획서
	개 정 현 황
	개정 번호	일 자	개 정 사 유	작 성	검 토	승 인
	1.0	2017.07.31	계약번호 제12132036600호 (2013.03.20)에 의거 작성, 제출

목   차

1. 공사개요	2

2. 망 구성도	3

2.1 2,3단계 Ring 구성도	3

2.2 Ring 통합 장단점	3

2.3 Ring 통합 망구성도	4

3. 2,3단계 절체 일정 및 방안	5

3.1 절체 일정	5

3.2 절체 구성	5

3.3 절체 방안	6

서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업	3단계 절체계획서	개정일자	2017. 08. 24
		개정번호	Rev. 0
	주전송 설비
		쪽번호	쪽

1. 공사 개요

구 분	주 요 내 용	비 고
사업명	서울지하철9호선 연장건설(3단계) 통신설비 구축
2. 공정명	주전송설비 2,3 단계 연결 구성 방안 계획
3. 공사위치	2, 3단계 Ring #1,2,3 정거장 통신기계실
4. 공사목적	서울특별시도시기반시설본부에서 건설하는 도시철도9호선 3단계 구간의 주전송설비 설치을 위한 작업
5. 규 모	1. 1, 2단계 925, 926, 927, 928, 929, 930 정거장 2. MSPP 1662SMC - 8 EA 931 ~ 938 정거장 (각 역사별 1 EA)
6. 주요공정	Ring#1 925 - 928 정거장 간 광케이블 제거 및 절체 작업 Ring#2 926 - 931 정거장 간 광케이블 제거 및 절체 작업 Ring#3 927 - 930 정거장 간 광케이블 제거 및 절체 작업
7. 공사기간	2018. 00. 00 ~ 2018.00. 00.

2. 망 구성도

2.1  2,3단계 Ring 구성도

9호선 2,3단계 주전송설비 Ring #1의 정거장 925 와 928과 2개 역간 연결된 STM-4 연결를 제거하고, Ring #2의 정거장 926 과 929 2개 역간 연결된 STM-4 연결을 제거하고, Ring #3의 정거장 927 과 930의 2개 역간 연결된 STM-4 회선연결을 제거하고, Ring 통합 구성 안

2.2 Ring 통합 장단점

장점

- 2,3 단계 Ring 통합시 2,3 단계 하나의 링으로 연결되어 운용상 편리한 망 관리

- 연결 구성이 단순하며, 회선 및 유지보수 용이

- 종단점 없는 하나의 링 구성으로 통합

단점

- 2,3단계 Ring 통합 구성 시 기존 2단계 구간 회선 삭제 및 절체 작업 필요.(야간작업실시)

- 2단계 기존  회선 영향.

2.3. Ring 통합 망 구성도

3. 2,3단계 절체 일정 및 절체 방안

3.1 절체 일정

2018. 00. 00 ~ 2018. 00 . 00 (3 일간)

- 1일차 - Ring #1 (925, 928, 931, 934, 937 정거장)

- 2일차 - Ring #2 (926, 929, 932, 935, 938 정거장)

- 3일차 - Ring #3 (927, 930, 933, 936 정거장)

- 절체 일정은 현장상황에 따라 변동 될 수 있음.

3.2. 절체 구성

3.3 절체 방안

Ring #1 2단계 925정거장에서 928정거장으로 연결된 Optical Cable을 제거하고, 925정거장에서 931 정거장과 연결 될 수 있도록 절체 한다. 그리고 928 정거장에서 934 정거장과 연결 될 수 있도록 Optical Cable을 연결하여 3단계 전송 설비와 통신이 되도록 한다.

Ring #2 2단계 926 정거장에서 929 정거장으로 연결된 Optical Cable을 제거하고, 926 정거장에서 932 정거장과 연결 될 수 있도록 절체 한다. 그리고 929 정거장에서 935 정거장과 연결 될 수 있도록 Optical Cable을 연결하여 3단계 전송 설비와 통신이 되도록 한다.

Ring #3 3단계 927 정거장에서 930 정거장으로 연결된 Optical Cable을 제거하고, 926 정거장에서 932 정거장과 연결 될 수 있도록 절체 한다. 그리고 929 정거장에서 935 정거장과 연결 될 수 있도록 Optical Cable을 연결하여 3단계 전송 설비와 통신이 되도록 한다.

회선 절체가 이상이 없다면, NMS에서 회선 구성 및 경보 상태 확인 한다

회선 절체 후 경보 및 비정상적일 경우 구성한 2, 3단계 정거장의 Optical Cable을 제거하여 기존 구성대로 원복을 실시한다.

장애 및 원인 해소 후 다시 절체 작업을 진행한다.