문서번호	토목부-18781
결재일자	2017.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이상욱B		여용석	09/07 김영수
협조

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

[사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로확장 기본 및 실시설계]

2017. 9.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

[사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로확장 기본 및 실시설계]

기술자문회의 자문의견인 “설계오류를 줄이기 위한 설계중 줄파기 시행”등에 따라 설계변경 및 준공기한 연기를 검토보고 드림

※ 준공기한 : 당초) 2017. 9.14. → 변경) 2017.10.30.(증45일)

1		관련근거

○ 수성 제2017-2565호(2017.9.5.) 설계변경 및 용역기간 연장 요청

2		용역개요

○ 용 역 명 : 사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로확장 기본 및 실시설계

○ 규    모 : 도로확장 폭4차로→6차로, 연장 618m, 지하철 출입구·환기구 이설

○ 용역기간 : 2016.5.23. ~ 2017.9.14.

○ 용역금액 : 347,360,000원

○ 용 역 사 : ㈜수성엔지니어링

3		추진현황

○ '15.08.28    :  투자사업 심사(적정)

○ '16.05.23    :  기본 및 실시설계 용역 착수

○ '16.06.22    :  착수보고 (도로계획과)

○ '16.12.30    :  기본설계 VE

○ '17.01.11    :  기본설계단계 용역완료

○ '17.01.12    :  실시설계 이관 요청 (도로계획과 → 토목부)

○ '17.03.02    :  기본설계 자문회의

○ '17.03.08    :  기본설계 주민설명회

○ '17.06.19    :  실시설계 자문회의

○ '17.09.현재  :  실시설계 VE 진행중

4		설계변경 내용

□ 주요 설계변경 사항

○ 기술자문회의 자문의견에 따라 줄파기(126m) 시행

○ 설계자문비 실비정산

□ 용역금액 변경내역                                     (단위 : 원)

구 분	설 계 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
1.기본및실시설계	282,996,370	282,996,370	-
2.측량비	10,240,000	10,240,000	-
3.지반조사비	8,120,000	8,120,000	-
4.경관설계비	10,450,000	10,450,000	-
5.줄파기	0	25,190,000	증)25,190,000
공급가액	311,806,370	336,996,370	증)25,190,000
5.손해배상공제료	1,930,000	2,090,000	증)160,000
6.부가가치세	31,373,630	33,908,630	증)2,535,000
합 계	345,110,000	372,995,000	증)27,885,000
7.설계자문비	2,250,000	1,200,000	감)1,050,000
총용역비	347,360,000	374,195,000	증)26,835,000

5		용역기간 변경

□ 준공기한 연기사유

○ 기술자문회의 자문의견에 따라 줄파기(126m) 시행

○ 줄파기 시행결과 반영 및 행정절차(설계VE, 교통규제심의) 수행을 위한 절대공기 부족에 따라 준공기한 연기가 필요

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
용역기간	'16.05.23.~'17.09.14.	'16.05.23.~'17.10.30.	증)45일

6		조치계획

○ 줄파기 시행 및 설계자문비 정산에 따른 설계변경 및 준공기한 연기에 대하여 주관부서인 도로계획과에 변경계약을 요청하고자 함.

○ 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자 귀책사유 없음(지체상금 미부과)

붙  임 : 1. 설계사 요청공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 예정공정표 1부.  끝.