투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(건설폐기물 처리용역기간 연장 및 용역기간 연장 승인)

1.업무지시현장 :  율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업 북일종합건설(주), 율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업 (주)한국해외기술공사

1).토목부-186953호 및 율곡감 제2017-222호와 관련임.

2).건설폐기물처리용역 준공기한 연기 및 지하차도 재설계 과업기간 연장 승인 요청에 대하여 검토한바, 건설폐기물 준공기한 연기는 토목공정 연기에 따른 불가피한 사항으로 사료되어 따로붙임과 같이 승인코자 하오니 재계약 등 향후 일정에 차질이 없도록 조치바람

3).지하차도 재설계(실시설계) 과업기간 연장에 따른 사유서를 검토한바,계약심사 지연에 따른 사항으로 감리단에서 요청한 일정으로 과업기간 연장을 승인코자 함.

따로붙임 : 검토보고서 1부.  끝.

주무관							김성권			광역도로과장					09/07 진재섭
협조자
시행			토목부-18768									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2557						/전송			02-3708-2599					/	sssggk@seoul.go.kr												/	대시민공개