1		꽃과 나무, 초록으로 피어나는 에코스쿨 만들기

□ 필요성 및 제안배경

○ 학교녹지의 중요성과 높은 사업요구도 등에 따라 서울시에서 2013년부터 노후된 학교녹지를 재생시키는 에코스쿨 조성 지속추진 중

- ‘13.~‘17. 말 기준 205개교 조성

- ‘15. 시장 공약사업으로 선정, 2개년 추진으로 목표 초과달성 후 지속추진 중

○ 학교 자체 녹지관리 전문인력 및 관심도 편차에 따른 관리부실 사례 빈발로 에코스쿨 조성지에 대한 체계적 관리 필요성 대두

○ 관계기관 워크숍, 전문가 참여 간담회, 시민정원사 인력 활용 녹지관리 자원봉사 지원 등 간접적인 사후관리책을 시행했으나 실제 사후관리 참여도에 한계가 있음.

□ 추진방향

○ 서울시 주도의 투자사업을 교육청과 함께하는 협력사업으로 전환

○ ‘(서울시) 기반마련 + (교육청) 학교별 맞춤형 사후관리’의 협업추진으로 친환경 교육환경 제공의 시너지 제고

○ 에코스쿨 조성지에 대한 체계적 사후관리계획 수립 및 관리로 이용자 만족도 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

○ 사업목표 : 총 100개교

○ 사업대상 : 서울시내 초·중·고교(에코스쿨 조성지)

○ 사업내용 : 에코스쿨 조성 및 사후관리 시행

작성자	서울시	조경과장 : 이원영 ☎2133-2100 조경시설팀장 :석승우 ☎2115 담당 : 조 현 ☎2120
	교육청	교육시설안전과 : 최영식 ☎3999-646 교육시설팀장 : 배도준 ☎657 담당 : 박종민 ☎658

-  서울시 : 자연학습장 및 학교숲 조성, 옥상·벽면녹화, 천연잔디밭 조성 등

- 교육청 : 교육프로그램 발굴, 운영 및 일상 유지관리 등 사후관리 시행

※ 서울시·교육청 간 업무분담

서 울 시	교 육 청	비고
‣사업추진 총괄 - 대상지 선정, 사업예산 확보 - 사업시행 및 전문유지관리* 지원	‣사후관리 총괄 - 관리예산 편성 - 교육프로그램 발굴 및 운영 - 일상 유지관리*계획 시행

* 전문유지관리 : 병해충 방제 등 장비를 동원한 전문 유지관리

일상유지관리 : 청소, 물주기. 풀뽑기 등 일상 유지관리

○ 소요예산 : 16,222백만원

-  (서울시) 에코스쿨 조성사업비 : 15,000백만원

‣에코스쿨 조성단가 1개교당 150백만원 적용

- (교육청) 에코스쿨 조성지 사후관리비 : 1,222백만원

‣사후관리비 세부내역 : 참고1

□ ’18년 추진계획

○ 대 상 지 ; 30개교

○ 사업기간 : ‘18. 1. ~ 12.

○ 사업예산 : 4,575백만원(서울시 4,500, 교육청 75)

○ 사업내용 : 에코스쿨 조성 및 사후관리 시행

○ 추진내용 및 절차

< 서울시 : 에코스쿨 조성 총괄>

-  ‘17. 10. : 2018년 에코스쿨 조성 대상지 선정심의 개최

‣서울시 및 교육청 관계자, 민간 전문가(공공조경가) 참여

-  ‘17. 11. ~ 12. : 예산확보

-  ‘18.  1. : 사업추진계획 시달(서울시 → 자치구)

-  ‘18.  2. : 사업대상지 관계자 워크숍 개최, 학교별 에코스쿨 추진위원회 구성

-  ‘18.  3. ~  4. : 설계 및 설계심의, 에코스쿨협약 체결

-  ‘18.  5. ~  9. : 공사시행

-  ‘18.  9. ~ 12. : 에코스쿨 콘테스트 개최, 백서발간 등 녹화보급활동 시행

< 교육청 : 사후관리 총괄 >

- ‘17. 11. ~ 12. : 예산확보

- ‘18.  1. : 사후관리계획 수립, 시달(교육청 → 해당 교육지원청 및 학교)

- ‘18.  2. : 에코스쿨 추진위원회 참여

- ‘18.  3. ~  4. : 기관별 교육프로그램 운영 및 관리계획 수립

(인력채용, 자재 및 소모품 구매 등)

- ‘18.  5. ~ 12. : 사후관리 시행

※ 사후관리 운영 : 수목의 초기활착 및 프로그램 운영 정착을 위해 조성후 1년간 사후관리비 지원 필요

□ 홍보계획

○ 다양한 녹화보급활동으로 학교녹지의 이용 및 관리에 대한 공감대 확산

- 워크숍, 간담회, 에코스쿨 콘테스트, 백서발간 등

○ 주요 언론매체 및 온라인 매체 등을 활용 홍보 추진

- TV, 신문 및 라디오, 일간지 등 활용 사업 및 사후관리 우수학교 홍보

- SNS를 활용한 ‘에코스쿨 조성’ 및 ‘우수 관리학교’ 소개

○ 기업대상 홍보를 통해 민간참여 유도

□ 기대효과

○ 토지보상비 소요없이 노후된 학교녹지 재생을 통해 지역편차 없는 친환경 녹색 교육환경 제공

○ 지속가능한 사후관리체계 마련으로 사업성 및 이용자 만족도 제고

○ 시·교육청 업무분담 강화로 기관별 긍정적인 파트너쉽 구축

□ 연차별 추진계획

주요내용			계	2018	2019	2020	2021	2022
추진내용	목 표 (단위 : 개교)		100	30	30	20	20	-
	소요예산 (단위 : 백만원)		16,222	4,592	4,867	3,336	3,244	183
		서울시	15,000	4,500	4,500	3,000	3,000	-
		교육청	1,222	92	367	336	244	183

※ 연차별 사후관리비 편성내역 : 참고2

참고1 : 사후관리비 산출내역 및 운영안

참고2 : 에코스쿨 조성 추진현황(2013년 ~ 2017년)

참 고 1		사후관리비 내역 및 편성방법

□ 1개교당 사후관리비 : 9,167천원

○ 연간 프로그램 운영비 : 1,920천원

-  60천원/2시간 × 1명 × 8개월 × 4회/월 = 1,920천원

‣적용단가 : 숲해설가 활동수당

‣운영기간 : (상반기) 3월~7월, (하반기) 9월~11월

○ 녹지관리 인건비 : 5,247천원

-  53,000원 × 1명(2개교당) × 9개월 × 22일/월 = 10,494천원

‣적용단가 : 자치구 녹지관리 기간제근로자 인건비

‣사역기간 : 3월 ~ 11월

○ 재료비 및 소모품비 등 : 2,000천원

-  재료비(비료 등) 1식 × 1,500천원 = 1,500천원

-  소모품비(마대, 장갑, 호스 등) 1식 × 500천원 = 500천원

※ 학교 여건 등에 따라 사후관리 항목 및 규모 탄력 적용

□ 편성방법

○ 사업 완료 후 식재수목의 초기활착 및 교육프로그램 운영 정착을 위해 1년간 사후관리비 지원

○ 당해연도 사후관리비는 1개교당 사후관리비의 30% 지원

-  통상 공사완료 시점이 2분기 말로 실제 운영기간은 9월~11월에 집중됨

- 사업추진 일정에 따라 탄력적용

○ 연도별 세부 사후관리비 현황

-  2018년 : 92백만원

‣ 30개교 관리비(275백만원) × 1/3 = 92백만원

- 2019년 : 367백만원

‣ ‘18년 관리비 + ‘19년 관리비의 1/3 = 275백만원 + 92백만원 = 367백만원

- 2020년 : 336백만원

‣’19년 관리비 + ‘20년 관리비의 1/3 = 275백만원 + 61백만원 = 336백만원

- 2021년 : 244백만원

‣‘20년 관리비 + ’21년 관리비의 1/3 = 183백만원 + 43백만원 = 244백만원

- 2020년 : 183백만원

‣‘21년 관리비 = 183백만원

참 고		에코스쿨 조성 추진현황(2013.~2017.)

○ 2013년도 : 23개교(19,355㎡), 2,757백만원

연번	자치구	대 상 지	규모(㎡)	사업비 (백만원)	공사개요	비고
계	총 23개교		19,355	2,757
소 계		에코스쿨존 2개소 (5개교)	14,500	1,636
1	동대문구	신답초~숭인중~ 천호대로47길~ 신답극동(아)	9,000	897	- 식 재 : 소 등 14종 159주, 수수꽃다리 등 13종 22,297주, 무늬억새 등 14종13,450본 시설물 : 체육시설, 테이블, 포장 등
2	구 로	영림중~구로고~ 신구로초교	5,500	739	식 재 : 공작단풍 28주, 회양목 9종 9,390주, 맥문동 등 6종 1,760본 시설물 : 보호판, 울타리, 포장 등
소 계		에코스쿨 18개소	4,855	1,121
1	중 구	창덕중	508	71	식 재 : 코니카가문비 등 9종 407주, 매발톱 등 13종 2,640본 - 시설물 : 안전휀스, 앉음벽, 안내판 등
2	용산구	후암초교	272	51	식 재 : 소 등 2종 5주, 회양목 등 9종 610주, 구절초 등 2종 580본 시설물 : 파고라, 목재데크 등
3		보성여고	185	69	식 재 : 소 등 3종 9주, 회양목 등 9종 1,070주, 구절초 등 7종 450본 시설물 : 쉘터, 평의자, 안내판 등
4	광진구	중마초교	142	56	- 식 재 : 눈주목 등 10종 251주, 금낭화 등 18종 2,520본 시설물 : 안전난간, 평의자 등
5	동대문구	삼육초교	176	120	식 재 : 선주목 등 5종 16주, 남천 등 11종 591주, 가우라 등 16종 2,800본 시설물 : 야외테이블, 데크 등
6		휘봉초교	108		식 재 : 둥근소 등 3종 9주, 수수꽃다리 등 10종 496주, 가우라 등 16종 2,700본 시설물 : 파고라, 디딤돌 등
7	강북구	창문여고	209	120	식 재 : 사철 등 2종 675주, 금남화 등 19종 3,720본 시설물 : 데크 등 10종
8		수유중교	1,186 (옥상 200, 지상 986)		식 재 : 장미 등 2종 568주 등 시설물 : 디딤목 등 8종
9	도봉구	동북초교	269	72	식 재 : 줄사철 등 21종 3,880본 시설물 : 파고라 등 10종
10		서울인강학교	189	86	식 재 : 산수국 등 17종 5,295주 시설물 : 등의자 등 8종

연도	자치구	대 상 지	규모(㎡)	사업비 (백만원)	공사개요	비고
11	노원구	상원초교	240.3	72	식 재 : 화살 등 2종 420주, 담쟁이덩 굴 등 23종 3,515본 시설물 : 등의자 등 7종
12		혜성여고	299.6	80	식 재 : 사철 등 3종 670주, 담쟁이덩굴 등 14종 2,664본 시설물 : 파고라 등 13종
13	은평구	불광초교	224	68	식 재 : 산수유 등 3종 15주, 회양목 등 3종 240주, 돌단풍 등 15종 330본 시설물 : 야외탁자, 안전난간 등
14	마포구	서울마포초교	355 (옥상 85, 지상 270)	52	식 재 : 둥근소 등 2종 6주, 목수국 등 8종 1,039주, 기린초 등 16종 1,155본 시설물 : 데크, 벤치, 음수전 등
15	강서구	방화중	179.44	78	식 재 : 사철 등 9종 820주, 꽃무릇 등 13종 1,050본 시설물 : 데크, 트랠리스 등
16	금천구	서울탑동초교	100	47	식 재 : 둥근소 8주, 산철쭉 등 1,320주, 수호초 등 19종 1,390본 시설물 : 데크. 평의자 등
17	동작구	신길초교	44.3	20	식 재 : 눈주목 등 7종 230주, 구절초 등 14종 550본 시설물 : 조형의자, 화강석판석포장 등
18	관악구	신림고교	168.6	59	식 재 : 낙상홍 등 7종 281주, 구절초 등 14종 3,400본 시설물 : 파고라, 데크 등

○ 2014년도 : 19개교(13,900㎡), 2,086백만원

연번	자치구	대 상 지	규모(㎡)	사업비 (백만원)	공사개요	비고
계	총 19개교		13,900	2,086
1	중 구	광희초등학교	537	125	식 재 : 스트로보잣 등 21종 1,136주, 맥문동 등 13종 2,937본 시설물 : 평상, 플랜터 등
2		경기여상	2,024	361	식 재 : 소 등 10종 3,874주, 담쟁이 등 7종 5,400본 시설물 : 파고라, 등의자, 데크포장 등
3	용산구	보성여중	177.39	58	식 재 : 소 등 2종 5주, 회양목 등 10종 900주, 구절초 등 10종 540본 시설물 : 연식의자, 데크 등
4	중랑구	장안중	269.62	86	식 재 : 회양목 등 3종 255주 등 시설물 : 휀스, 데크 등
5	노원구	대진여고	310	90	식 재 : 산수유 등 2종 31주, 영산홍 등 7종 3,463주, 구절초 등 15종 10,623본 시설물 : 데크, 파고라, 판석 등
6		상월초교	320	90

연번	자치구	대 상 지	규모(㎡)	사업비 (백만원)	공사개요	비고
7	은평구	증산중	312	98	식 재 : 조형소 1주, 꽃댕강 등 13종 2,000주, 기린초 등 25종 2,213본 시설물 : 데크, 게시판, 옹벽 등
8	마포구	경성중	346 (옥상 85, 지상 261)	99	식 재 : 계수 등 7종 24주, 덩굴장미 등 12종 2,395주, 벌개미취 등 8종 1,775본 시설물 : 파고라, 데크 등
9	양천구	백암고	434	200	식 재 : 사철 등 11종 1,933주, 구절초 등 15종 1,370본 시설물 : 데크, 앉음벽 등
10		신목중	1,442 (옥상 50, 지상 1,392)		식 재 : 화살 등 4종 2,510주, 옥잠화 등 5종 1,550본 시설물 : 사각정자, 평의자 등
11	강서구	강서공고	387.7	120	식 재 : 청단풍 등 10종 620주, 감국 등 23종 4,560본 시설물 : 데크, 파고라, 의자 등
12	구로구	신도림중	950	115	식 재 : 사철 등 9종 2,280주, 줄사철 등 3종 930본 시설물 : 파고라, 평의자 등
13	금천구	서울영남초교	640	40	식 재 : 사철 등 4종 550주, 담쟁이 등 175본 시설물 : 야외탁자, 데크 등
14	영등포구	대영고교	671 (옥상 169, 벽면 502)	78	식 재 : 산수유 등 2종 36주, 조팝 등 9종 2,550주, 황금조팝 등 29종 6,155본 시설물 : 휀스 등
15	동작구	강남초교	2,000	106	식 재 : 왕벚 3주, 산수국 등 2종 240주, 상사화 등 3종 800본 시설물 : 데크, 습지원, 텃밭, 계단 등
16		장승중	2,000	114	식 재 : 사철 등 4종 450주, 능소화 등 4종 1,740주 시설물 : 파고라, 평의자 등
17	관악구	난우중	300	90	식 재 : 화살 등 11종 648주, 옥잠화 등 6종 1,268본 시설물 : 평의, 트랠리스 등
18	송파구	가락고교	486	168	식 재 : 에메랄드골드 5주, 산딸 등 16종 450주, 구절초 등 24종 2,125본 시설물 : 파고라, 테이블 등
19		방이중	238	48	식 재 : 스트로브잣 2주, 남천 등 7종 499주, 담쟁이덩굴 등 10종 3,780본 시설물 : 벤치, 안내판 등

○ 2015년도 : 39개교(26,964㎡), 4,210백만원(시 4,050, 국 160)

자치구	대 상 지	규모(㎡)	사업비(백만원)	사 업 내 용	비 고
20개구	39개교	26,964	4,210 (시비4,050, 국비 160)
중 구	환일고	161	35	벽면녹화
용산구	금양초	400	100	학교숲 조성
성동구	행당초	1,130	100	벽면녹화, 녹지조성 등
	동명초	1,700	250	학교숲 조성
동대문구	군자초, 용두초	1,404	100	학교숲 조성
중랑구	상봉중	560	80	녹지조성 등
	신현중	160	70	옥상녹화
성북구	동신초	2,800	135	자연체험학습장 조성 등
강북구	송중초	230	85	벽면녹화, 녹지 조성 등
도봉구	월천초	256	100	옥상녹화 등
마포구	성원초	1,400	150	옥상녹화, 녹지 조성 등
양천구	신남초	300	100	자연학습원 조성 등
강서구	송정중	500	110	녹지조성 등
	개화초, 백석초, 영등포공고	1,410	300	학교숲 조성
	화곡보건경영고	1,000	100	학교숲 조성
구로구	고척초	2,456	130	녹지조성 등
금천구	독산고	270	100	옥상녹화
영등포구	우신초, 대동초, 신대림초	2,700	300	학교숲 조성
	윤중초	700	100	학교숲 조성
동작구	문창초	370	75	벽면녹화, 잔디밭 조성 등
	행림초	250	15	벽면녹화
관악구	봉현초	528	200	옥상녹화
	성보중	1,000	100	텃밭조성
서초구	서초중	500	130	녹지조성 등
강남구	구룡중	157	60	옥상녹화
	왕북초	117	45	옥상녹화
송파구	잠신초	288	100	학교숲 조성
	영동일고	233	100	학교숲 조성
	석촌초	300	200	학교숲 조성
강동구	둔촌고	1,140	340(시비180,국비160)	옥상녹화
	신암중	600	100	학교숲 조성
	고덕초, 강동중, 선사고	1,920	300	학교숲 조성

○ 2016년도 : 68개교(50,365㎡), 8,692백만원(시 8,492, 국 200)

○ 대 상 지 : 중구 남산초 등 68개교 ○ 규 모 : 50,365㎡ ○ 사 업 비 : 8,692백만원(시비 8,492, 국비 200)							연번	자치구	대 상 지	규모(㎡)	사업비(백만원)	사업내용	비고
							32	구로구	구로남초	980	200	자연학습장
							33		영서초	380	100	자연학습장
							34		오남중	300	100	자연학습장
							35	금천구	가산중	200	60	학교숲
연번	자치구	대 상 지	규모(㎡)	사업비(백만원)	사업내용	비고	36	영등포구	영림초	500	100	생태연못
1	중 구	남산초	440	92	벽면,학교숲		37	동작구	신상도초	2,030	200	벽면,학교숲
2		성동공고	500	60	옥상녹화		38	관악구	남부초	540	90	학교숲
3	용산구	용강중	1,020	280	옥상,학교숲		39		삼성초	570	80	학교숲
4		용산고	430	150	벽면녹화		40	서초구	신중초	400	80	자연학습장
5	성동구	경일중	500	80	자연학습장		41		방배초	250	300	벽면, 자연학습장
6	광진구	광양고	2,500	100	벽면,학교숲		42		반포초	800		자연학습장
7	동대문구	용두초	800	150	자연학습장		43	강남구	진선여중	500	150	옥상녹화
8		경희중고	1,080	130	학교숲		44		도곡중	600	150	벽면,학교숲
9		청량리고	960	110	학교숲		45		신구중	620	150	학교숲
10		동답초	650	200	자연학습장		46	송파구	잠신고	474	80	학교숲
11		안평초	800	200	자연학습장		47		가동초	1,000	300	학교숲
12	중랑구	중곡초	400	80	학교숲		48		송파중	750		학교숲
13		송곡관광고	1,000	150	텃밭,학교숲		49		삼전초	400	80	학교숲
14	성북구	경동고	625	130	학교숲		50		신천중	400	80	학교숲
15		성북초	997	150	학교숲		51		잠전초	400	80	학교숲
16		홍익중	925	150	벽면,학교숲		52		버들초	400	80	힉교숲
17	도봉구	누원고	550	100	학교숲		53		정신여중	400	80	학교숲
18	노원구	계상초	1,700	100	자연학습장		54		정신여고	1,000	100	자연학습장
19	은평구	연서중	1,000	100	옥상녹화		55		아주초	750	100	자연학습장
20		구현초	490	150	자연학습장		56	강동구	강명중	1,495	200	벽면,학교숲
21	마포구	아현초	1,400	130	학교숲		57
									성내초	720	120	학교숲
22		성사중	662	100	벽면,학교숲		58
									신암초	700	110	벽면, 자연학습장
23		경성고	600	150	자연학습장		59
									천호초	600	120	벽면, 자연학습장
24	양천구	신목초	1,000	100	자연학습장		60
									둔촌중	750	150	학교숲
25	강서구	염경중	720	330(시130,국200)	옥상녹화		61
									명덕초	900	150	학교숲
									명일중	1,100	150	벽면,학교숲
26		한서고	625	150	자연학습장		62
									강명초	600	130	옥상,학교숲
27		경서중	915	150	자연학습장		63
									한영고	450	130	학교숲
28		등명중	730	130	옥상녹화		64
									강동중	512	100	학교숲
29		공항초,등원중	490	150	벽면녹화		65
									명일초	450	130	벽면,학교숲
30		공항중	570	150	학교숲		66
									광문고	906	130	학교숲
31		방화초	783	130	자연학습장		67

○ 2017년도 : 56개교(37,213㎡), 7,699백만원(시 7,335, 국 364)

연번	자 치 구	대 상 지	사업비 (백만원)	규모(㎡)	사 업 내 용	비 고	연번	자 치 구	대 상 지	사업비 (백만원)	규모(㎡)	사 업 내 용	비 고
1	중구	금호여중	90	360	학교숲		29	강서구	신곡초	80	290	자연학습장
2	용산구	중경고	75	300	학교숲		30		등명초	180	1,200	천연잔디밭
3	성동구	무학중	100	264	옥상녹화		31		한서고	135	675	벽면녹화
4		응봉초	80	320	자연학습장		32	구로구	경인고	95	800	학교숲
5		동마중	150	600	자연학습장		33		구로중	350	1,500	학교숲
6	광진구	건대사대부중	138	900	옥상녹화	국 180	34		신도림초	75	300	옥상, 자연학습장
7	동대문구	홍릉초	150	600	자연학습장		35	금천구	금동초	100	285	벽면녹화
8	중랑구	면중초	93	372	학교숲		36	영등포구	당서초	70	200	벽면, 자연학습장
9		혜원여고	500	2,000	학교숲		37		문래중	150	100	벽면, 자연학습장
10	성북구	장위초	95	600	자연학습장, 연못		38		영등포초	150	200	자연학습장, 연못
11		석관중	52	210	학교숲		39	동작구	국사봉중	85	340	학교숲
12		돈암초	200	680	옥상, 자연학습장		40		보라매초	150	600	자연학습장
13		홍대사대부고	200	800	학교숲		41		대방중	150	600	학교숲
14		숭례초	80	320	자연학습장		42	관악구	인헌고	80	400	자연학습장
15	강북구	번동초	300	1,092	자연학습장		43		문영여중	60	100	옥상녹화
16	도봉구	월천초	93	600	벽면녹화		44		신봉초	130	525	자연학습장
17		도봉초	150	600	자연학습장		45	서초구	반포고	93	475	학교숲
18		자운초	100	700	자연학습장		46	강남구	도곡초	200	800	학교숲
19	노원구	덕암초	70	226	옥상녹화		47		도성초	140	560	학교숲
20		삼육고	50	1,500	학교숲		48		진선여고	150	500	학교숲
21		공름중	150	821	학교숲		49		언북중	200	820	벽면녹화
22	은평구	구현초	137	1,054	옥상녹화	국 184	50	강동구	강일중	34	136	학교숲
23	서대문구	가재울초	95	250	옥상녹화
									고덕중	200	800	학교숲
							51
24	마포구	신수중	63	250	학교숲
									강일초	150	600	자연학습장
							52
25	양천구	양강초	92	1,000	학교숲
									명원초	120	480	자연학습장
							53
26		신원중	150	1,000	학교숲
									묘곡초	150	600	자연학습장
							54
27	강서구	공진중	45	208	학교숲
									선사초	150	500	옥상녹화, 학교숲
							55
28		염동초	75	200	학교숲
									서울컨벤션고	135	540	학교숲
							56