문서번호	기전과-6463
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		곽희영	09/11 代박영종
협조	주무관		이명호
	주무관		김수진

『2017년 교통신호기 신설 및 보수사업』

추가재배정 예산 사용계획

2017. 9.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2017년 교통신호기 신설 및 보수사업』

추가재배정 예산 사용계획

교통신호기 신설 및 보수사업 예산이 추가재배정되어 아래와 같이 교통신호기 유지보수공사를 추진하고자 보고드림.

Ⅰ

시 설 물 현 황

구 분	신 호 기					안전표지(매)
	계	신호등 (조)	제어기 (대)	음향신호기 (대)	보행자 보조장치(대)
계	10,495	7,470	522	1,054	1,449	13,055
성동구	2,216	1,609	116	198	293	2,939
광진구	2,109	1,419	105	194	391	3,738
동대문구	3,187	2,231	153	375	428	3,321
중랑구	2,983	2,211	148	287	337	3,057

Ⅱ

예 산 현 황

○ 기배정예산

- 교통운영과-1326호(2017.01.23.) : 1,385,600천원

○ 추가재배정예산

- 교통운영과-13191호(2017.07.12.) : 213,270천원

○ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비.

Ⅲ

예산집행현황

○ 공사 및 관급자재 집행현황                              (단위 : 천원)

공사명	발주금액	계약금액	낙찰차액	비고
2017년 교통신호기 신설 및 개량공사 (연간단가)	350,000	305,731	44,268
2017년 교통신호기 유지보수공사 (연간단가) 1구역	350,000	304,420	45,548
2017년 교통신호기 유지보수공사 (연간단가) 2구역	350,000	302,290	47,709
2017년 교통신호지주 관급자재 구매	170,009	144,813	25,195
2017년 교통신호제어기 관급자재 구매	119,723	108,192	11,530
소 계	1,339,732	1,165,446	174,250

○ 이전비 집행현황                                       (단위 : 천원)

공사명	사용예상금액	집행금액	사용가능액
이전비 및 기타 -도로굴착 복구비, 시각장애인음향신호기 검사비, 전기안전공사 검사비 등 기타	35,600	22,189	13,411

Ⅳ

추 진 계 획

○ 관급자재구매 낙찰차액 사용계획                         (단위 : 천원)

관급자재구매	기집행금액	낙찰차액	사용가능액
300,000	298,539 (자재구매 : 8,806)	36,725	38,186

- 교통신호제어기 구매 : 30,000천원

- 교통신호등 소모자재 구매 : 8,186천원

○ 공사비 낙찰차액 및 추가재배정예산 집행계획             (단위 : 천원)

공사명	발주금액	낙찰차액	증액	준공예상금액
2017년 교통신호기 신설 및 개량공사 (연간단가)	305,731	44,268	70,000	420,000
2017년 교통신호기 유지보수공사 (연간단가) 1구역	304,420	45,548	70,000	420,000
2017년 교통신호기 유지보수공사 (연간단가) 2구역	302,290	47,709	70,000	420,000
이전비 및 기타	13,411		3,270	16,681
소 계	925,852	137,525	213,270	1,276,681

Ⅳ

향후 추진계획

○ 관급자재구매 낙찰차액을 활용하여 추가로 관급자재 및 유지보수 자재를 구매하고,

○ 교통신호기 유지보수공사 낙찰차액 및 추가재배정예산을 활용하여 노후교통시설물 교체 및 규제공사를 추진 후 설계변경하여 준공하고자 합니다.

첨  부 : 1. 교통신호기 신설 및 보수사업 추가예산재배정 1부.

2. 교통신호기 신설 및 보수사업 기배정 예산 정정 1부. 끝.