제97차 건설기술심의소위원회 의결사항

심의일자 : 2017. 9. 11.

□ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 아래 주요 심의내용 및 별첨 위원별 심의의견을 보완 반영하는 조건으로 조건부채택 의결함.

【 주요 심의내용 】

○ 버스 및 택시 정류장과 장애인 주차장에서의 장애인용 승강기 이용 편리성 확보방안을 검토할 것

○ DECK 레벨 접근 관련 2층 편의시설 위치를 조정하고, 2층 옥외 통로폭 5m 이상(동일 폭 이상)으로 확보할 것. 환승출입구의 폭, 방풍실 형상 등을 재조정할 것.

○ 창곡교차로측에서 접근해오는 보행자를 고려해서 차도와 보행자 도로가 만나는 부분은 보행자 우선으로 보도폭, 바닥마감, 접근로 계획할 것.

○ 운행선 인접공사에 대한 안전대책을 수립할 것

○ 승강장 기초 하중에 의한 침하량과 흙막이 굴착에 따른 수평변위로 인한 기초의 침하량을 모두 고려하여 승강장 기초의 안정성을 평가할 것.

○ 본 정거장은 변위가 심한 자갈도상에 곡선부 승강장 설치구간이므로 기존 선로 조사 및 궤도정정 설계 반영할 것.(정거장 구간으로 무캔트 설계 반영 검토 및 콘크리트도상 검토 필요)

○ R.C Box 구조물이 11m로 폭이 넓어 장기적인 유지관리를 고려할 시 처짐 등에 의한 콘크리트 균열 등이 예상되니 이에 대한 대책을 강구할 것.(in, out 부분 폭 조정, 기둥 설치 검토 요망)

○ 옥상층 조경식재를 위한 토심과 토심확보를 위한 구조물의 하중을 반영하여 구조 검토할 것 요망.

첨부 : 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.  끝.

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 건축계획

항 목	채 택 의 견	비 고
관련법령 적용 적합성	1. 문화예술진흥법에 의한 미술장식품 설치계획 검토
계획성	2. 지상2층 환승연결통로(제안부분) 미 시공시 대중교통수단 (버스, 택시)의 접근동선에 따른 승객의 동선체계 검토 (1) 주변의 버스 노선에 따른 접근성과 버스 정류장으로 부터의 접근동선 체계와 승객 수에 따른 1층에서의 대합실측 이동동선 계단과 E/S의 위계와 적정성 검토 3. 버스 및 택시 정류장 과 장애인 주차장에서의 장애인용 승강기 이용 편리성 확보방안 검토 (1) 동측 및 정거장내 버스 및 택시 정류장과 장애인 주차장에서 접근하는 장애인 및 노약자의 장애인용 승강기 이용시 정거장 기능실 복도를 이용하거나 서측의 장애인용 승강이 이용하는 등 동선체계상 길고 불편함 (2) X7,8열에 별도 출입구 설치하는 안과 대안 검토 필요 (3) 현재 계획안 유지시 장애인이 아닌 노약자의 이용을 유도하기 위한 출입구의 인지도 확보와 현관 출입구 계획 보완이 필요 (4) 또한 2층 개찰구와 승강기 대기공간이 근접하여 동선이 혼잡하니 대기공간을 확보토록 승강기를 계단실측으로 이치 이동하거나 개찰구 위치를 조정 4. 지상2층 여객통로-1의 계단과 E/S 의비 변경 검토 (1) E/S 의 현재 위치는 경사가 긴 계단에 의해 폐쇄된 공간으로 대합실에서의 접근시 인식이 어려우니 계단을 외부 창측으로 변경하는 안 검토 (2) 계단과 E/S의 위치변경에 따른 승객의 동선흐름에 문제는 없는지 검토 5. X7,9~Y3,4열 외부계단 및 E/S의 승객 이용 편리성 검토 (1) 이 수직동선체계의 승객 이용률에 대한 검증이 필요 함. 이는 X3~Y4열의 주 수직동선체계의 이용시 주 간선도로의 버스동선체계상 U-Turn 접근 또는 간선도로 반대편 버스정거장에서의 접근시 동선이 길어 버스 노선에 따라 승객의 접근이 더 용이 할 수 있음. (2) 이용률이 높을 경우 E/S의 내구성 확보와 승객의 이용 편리성 차원에서 우천시와 눈이 내릴 경우를 고려, 캐노피 계획이 필요 하니 그 적정성을 검토 6. 지상2층 화장실 입구 위치 재검토 (1) 여객통로-1의 개찰구와 근접하여 승객의 승하차시 동선이 상호 교차하여 번잡하니 Y3열측으로 위치 변경 검토 7. 지상2층 고객안내센터-1의 기능과 위치의 적정성 검토 (1) 고객안내센터-1을 칸막이로 구획한 협소한 실로 배치한 기능을 검토 (2) 배치된 위치가 대합실의 주통로로 협소해 보이니 X3~Y3열 기둥의 E/S 측 공간을 활용, 카운터형의 안내센터로 기능을 활용하는 방안 검토 8. 자전거보관소 실 배치 계획 검토 (1) X1,2~Y1,3열 물탱크실 옆 자전거보관소는 외부로부터 내부의 실 깊이가 너무 깊어 어둡고 보안에 취약하니 물탱크실 평면을 승강장측으로 변경하여 자전거 보관소의 외부 면 길이를 확장하고 실 깊이를 줄여 이용자의 편이를 배려토록 검토 9. 2층 여객 휴게실의 인테리어 계획 실시설계시 반영토록 검토 10. 직원 샤워실 및 탈의실 시설 보완 (1) 샤워부스의 대향 설치시 이격거리 부족으로 동시 샤워가 어려우니 시설개수 확인 후 재배치 검토 (2) 탈의실 내 세면기능 보완
시공성	11. 지상2층 환승연결통로(제안부분)의 단부 마감 및 추후 통로 연결시 시공방안 검토 (1) 환승연결통로(제안 부분)이 시행되지 않을 경우의 디자인 및 마감 계획을 검토 (2) 공사 시 또는 준공 후 환승연결통로 공사 계획 확정시 이에 따른 브릿지 연결방안, 공법 등을 고려한 상세계획 검토
안전성	12. 지붕재 평구배에 따른 누수 및 겨울철 적설 대책 검토

2017년  9월  11일

심의위원 :   조 익 수   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 건축계획

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1, 창곡교차로 횡단보도를 이용한 후 동측에서 추가역으로 접근하는 보행자가 많을 것으로 예상됩니다. 본 계획안을 창곡교차로로 부터의 접근을 주진입동선으로 보고 전반적으로 계획안을 수정 할 것. - 수직동선의 폭, 수량, 여유공간의 배분 등등 -- 주요 고려사항 (심의시, 위례 지하차도와 창곡교차로가 나오는 주변 광역지도 첨부 할 것.) 2. 지상1층의 수직동선 전면 공간을 창곡교차로 접근측을 넓게 확보 할 것 3. 역(驛)사는 고객 이용의 편의성 및 고객의 공간이 최우선으로 고려되어야 합니다. 동측 보행접근로가 보행자 중심으로 재정리 할 것. (보행자를 위한 보도의 폭 확대 및 보도마감, 보도 레벨우선 , 차로 푹소 등) 4. 특히 지상주차공간이 고객전용 주차공간이 아니고, 직원전용이라면 복우천변으로 이동해서 최소한으로 설치하는 것을 검토 할 것.. 5. 창곡교차로측에서 접근해오는 보행자를 고려해서 차도와 보행자 도로가 만나는 부분은 보행자 우선으로 보도폭, 바닥마감, 접근로 계획할 것. (기준인 1/18 이하의 경사로로 계획할 것.) 6. 하행방향을 이용하는 장애인이나 어르신들이 장애인 E.V 3개를 이용해야하는 불편함이 있습니다. 2개의 장애인용 E.V 이용으로 승강장에 접근 할 수 있게 계획안을 수정 검토 할 것. 7. 즉, 지상1층에서 X7~Y2열의 엘리베이터를 고객이 접근하고 이용할 수 있게 수정 검토할 것. 8. 자전거 보관소의 위치 및 배분을 재조정할 것. (현 위치가 구석지고, 사용상 불편하며, 균등한 배분이 아니며, 실제 사용자의 입장에서 계획을 수정할 것) 9. 시각장애인이나 청각장애인의 이용측면에서 승강장으로 접근하는 점자블럭과 음성안내기의 계획을 구체적으로 제시 할 것.. 10. 지상2층 여객통로-2와 EV 전면의 공간이 상충되는 부분이므로 여유공간을 좀 더 확보하거나 개선안을 검토 할 것 11. 수유실의 구체적인 LAYOUT 을 제시할 것 - 남녀가 함께 대기 할 수 있는 공간과 개별의 수유공간을 별도로 계획 할 것. (공간의 배분상 수유실을 키우고 고객상담실을 조금 줄이는 방향으로 검토 할 것.) 12. DECK 레벨 접근 관련 2층 편의시설 위치를 조정하고, 2층 옥외 통로폭 5m 이상(동일 폭 이상)으로 확보할 것. 환승출입구의 폭, 방풍실 형상 등을 재조정할 것. 13. X7 ~ Y2 열 EV 위치를 조정하여 고객 중심으로 재조정 할 것 14. 교통흐름에 따른 수직동선의 위치, 위계 조정할 것	추가 추가 추가

2017년  9월  11일

심의위원 :   이  상  곤   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 건축구조

항 목	채 택 의 견	비 고
안전성	1. 구조계산서는 지상정거장(3F) 구조물에 대해서만 수록되어 있음. 2. 활하중 저감에 대한 내용이 포함되어 있지 않음. 구조계산서에서는 이와 관련된 정보를 확인 할 수 없으므로 기준에 적합하게 산정하여 기둥 및 기초설계에 반영 요망 3. 슬래브 또는 작은 보와 같이 스팬이 짧은 구조요소의 설계에는 등분포활하중뿐만 아니라 집중활하중에 대해서도 검토하여 등분포하중보다 전단이 크게 나오는 부분이 없는지 확인이 필요 4. 칸막이벽이 표시되어 있지 않더라도 설치될 것을 예상하여 1.0kN/m2 이상의 하중을 적용하여 검토 요망 5. 구조계산서 구조설계개요에 지진력 저항시스템을 “강구조설계기준의 일반규정만을 만족하는 철골구조시스템”으로 표기하고 실제 내진설계 내용에는 “콘크리트설계기준의 일반규정만을 만족하는 철골구조시스템”으로 표기함. KBC2016에 있는 시스템으로 정확한 표기 요망. 6. 비정형구조물에 대한 검토내용이 없으므로 포함 요망. 내진설계 범주 C인지 D인지에 대한 면밀한 검토 요망. (구조물 높이 포함) 7. 적설하중 산정과정에 대해 지붕의 경사각을 포함하여 상세하게 기술 요망. 8. 옥상층 조경식재를 위한 토심과 토심확보를 위한 구조물의 하중을 반영하여 구조검토 요망. 가능하면 구조물에 대한 경량하중에 대해서도 검토 요망.	추가

2017년  9월  11일

심의위원 :   박  지  영   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 건축시공

항 목	채 택 의 견	비 고
시공성	1. VE 반영사항 중, 무근콘크리트 보강재 변경(와이어메쉬→ 섬유 보강재)은 시공성이 우수하나 현장관리가 중요한 사항이므로 건축시방서에 추가 반영 요함. 2. 외장재로 적용된 테라코타 판넬 및 루프데크패널의 마감상세도를 추가 작성하고 건축시방서에도 추가 반영 요함.
유지관리 /안전성	3. 지붕 평면도 상에 옥상 조경계획이 반영되어 있으므로 옥상 조경 설치 부위에는 방근·방수계획을 반영 요함.
경제성	4. VE 제안사항 중 창고,기계실,전기실의 바닥재 변경(에폭시라이닝 → 에폭시코팅) 및 직원 침실의 천정재 변경(석고보드 2Ply+수성 페인트 →석고보드 1Ply+천장지)은 각 실의 용도를 고려 시 적극 반영 추천함.

2017년  9월  11일

심의위원 :   전  금  석   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 기계설비

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 호스릴 옥내소화전설비의 경우 마찰손실에 대한 부분을 고려하여 양정을 산정하시기 바랍니다. 2. 소방설비 적용부분에 소화활동설비부분(연결송수관설비)이 누락됨 3. 전실 제연설비 계산서 누락됨(기계소방계산서)
유지관리	4. 기계소방 시방서에 소화활동설비(연결송수관설비) 내용 누락됨
안전성	5. 최근 소화기 제조업체서 독성간염으로 사망자가 발생하였다 그 소화기가 HCFC123으로 독성이 있다. 검토바랍니다.(CEA-123소화기)

2017년  9월  11일

심의위원 :   윤  정  은   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 전기설비

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. E-004 전기실 단선결선도-1 2호계(우측부분) 표기유류 수정바람 (1) 전등용 TR-L1→TR-L2 (2) 동력용 TR-P1→TR-P2 2. LV-EL1판넬의 TN-TEL차단기용량 부하계산서와 상이함 (1) 100/75 →100/100 3. E-032~035 조명기구상세도 보완 (1) 조명기구상세도에 광색을 색온도[K]로 표기하기 바람
시공성	4. E-006~010 수배전반 배치도에 단선결선도와 상이함 (1) 2호계 LV-L2-1판넬 누락된바 재배치 하기 바람 5. E-011~012 수배전반 외함상세도 수정 (1) 1호계 수배전반 외함상세도는 장비배치도와 동일하게 수정하기바람(TR-P1과 TR-L1이격, HV-4-1추가) (2) 2호계 LV-L2-1판넬 추가배치할 것

2017년  9월  11일

심의위원 :   기  유  경   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 토질 및 기초

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 토목보고서 P51, 지반조사보고서 P46의 설계 지반정수가 상이하니 확인 후 통일하시오. 2. 계측기 설치도, 상세도를 도면에 추가하시오.
시공성	3. 승강장 종점부(성토부)의 경우 승강장 하부 성토단계에서 L-형 옹벽 위치에 보강토 옹벽을 선 시공하는 것을 검토하시오. 이 경우 기존 철로에 근접하여 계획된 가시설 설치, 터파기 등의 공종이 필요 없을 것으로 사료됨. 보강토 옹벽 터파기 최소화 할 것.	보완
안전성	4. 승강장 기초 하중에 의한 침하량과 흙막이 굴착에 따른 수평변위로 인한 기초의 침하량을 모두 고려하여 승강장 기초의 안정성을 평가하시오. 5. 기존 철로 옆에 시공되는 흙막이 가시설(H-말뚝, 어스앵커)은 옹벽 시공 후 제거하는 것인지? 또는 매몰시키는 것인지? 만약 제거하는 경우 철도 구조물에 미치는 영향을 최소화 하도록 제거에 관한 시방규정을 수록하시오. 6. L-형 옹벽의 접지압 및 허용지지력을 도면에 표시하고, 현장에서 평판재하시험 등에 의해 확인 후 시공하도록 도면에 기술하시오.

2017년  9월  11일

심의위원 :   강  대  규   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 토목구조

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 시추조사시 지하수위 측정시기가 갈수기인지 우수기인지를 명기하고 가장 강수량이 많은 시기로 지하수위를 제안하기 바람.
시공성	2. 복개구조물을 Box단면으로 선정하게 되면 하천의 물을 완전히 막고 저판공사가 이루어져야 하므로 라멘 형식으로 재검토 바람. 3. 승강장 공법 선정시 장비조합을 반영하여 재검토하기 바람
유지관리	4. 부유물이 걸리면 통수단면이 줄어들고 따라서 수위가 높아질 수 있으므로 Box단면 보다는 라멘교 형식으로 재검토 바람. 5. 복개구조물에 Box형식으로 공사하게 되면 저판이 침식되어 유지 관리가 어려움을 겪을 수 있으므로 라멘교 형식으로 재검토 바람. 6. 운행 중인 기존 구조물에 연결되는 구조물에는 신구콘크리트 재령 차이에 의한 건조수축과 침하에 의한 균열을 방지하기 위해 30cm 정도 분리 시공 후 무 수축 또는 팽창 콘크리트 타설 바람.
안전성	7. 내진설계를 수행하기 바람. 8. 강결 접합식 연결부에 대한 안전성을 검토바람. 9. 강결 접합 방식에서 벽체 단면이 일체적으로 연결되는지 재검토하고 종방향 연결에 대해서도 정확히 표기하기 바람.	추가

2017년  9월  11일

심의위원 :   김  춘  호   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 토목시공

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 횡단면도에서 죄측 승강장이 절·성 경계부에 설치토록 계획되어져 있어 부등침하 등의 우려가 예상되니 이에 대한 대책을 강구하시기 바람.(잡석치환만으로는 부족하므로 적극적 검토 필요) 2. 가시설 황단면도 B-B 단면에서 어어스앵커의 앵커체가 승강장 및 노반 아래까지 시공되는 것으로 보여지는데 어어스앵커 설치·철거시의 시공 계획 및 승강장이나 노반의 침하 우려가 있으니 이에 대한 방안도 강구하시기 바람. 3. 가시설 횡단면도 C-C 단면에서 승강장 좌측 H-Pile과 시공순서도상에서 도면이 상이하므로 확인하시고 가시설 매몰여부도 명기하시기 바람. 4. 승강장내 구내배수가 매우 중요하므로 상세도를 별도로 작성하여 도면에 표기하고 승강장 단부에 미끄럼방지 시설 등을 표기하시기 바람. 5. 승강장 이용시민의 안전을 확보하기 위한 안전문의 설치여부를 표기하시고 안전문을 설치한다면 캔틸레버부의 구조적 안전정성도 검토하여야 할 것임. 6. 종배수관 도면(도번 C44)에서 토질 조건에 따라 배드 기초 시공여부를 구분하여 표기하시기 바람. 7. 원형1호 맨홀 상세도(도번 C45) A-A단면도에서 맨홀 바닥부 처리(유입.유출부)가 적정한지 확인하시기 바람.	보완
시공성	8. R.C Box 구조물에서 Mass 구조물(바닥기초:1.0m, 상부.벽체:0.9m)이므로 콘크리트 타설시 콘크리트 타설계획(레미콘수급방안, 타설시간, 운반거리, 기온등 고려)을 수립하고 수화열 발생이 예상되니 이에 대한 방안도 강구하시기 바람. 9. R.C Box 구조물의 콘크리트 타설 순서도(도번 C21)에서 벽체 콘크리트 하부 시공이음부를 둘 경우 균열이나 누수등의 우려가 있으니 이에 대한 방안을 도면에 상세하게 표기하시기 바람. 10. 법면 계획으로 식생블럭을 선정하여 설계에 반영하였는데 식생블럭의 배면에 토사 유츨시 문제가 될수 있으니 상세도면을 표기하시기 바람. 11. R.C Box 구조물과 식생블럭 연결부가 토사침식등의 취약부위이므로 연결부 상세도면을 도면에 표기하시기 바람.
유지관리	12. R.C Box 구조물이 11.0m로 폭이 넓어 장기적인 유지관리를 고려할 시 처짐등에 의한 콘크리트 균열등이 예상되니 이에 대한 대책도 강구하시기 바람.(in, out 부분 폭 조정, 기둥설치 검토 요망)	보완
안전성	13. 식생블럭 상부에 방호벽을 설치하도록 설계되어져 있는데 풍압이나 외압에 의한 안전성 및 지지력등이 확보되어 있는지 확인하시기 바람. 14. 공사차량의 진·출입시 안전한 통행 및 주변의 차량 소통에 지장이 없도록 교통처리 계획과 공사 중 안전시설물 설치 계획을 수립하시길 바람.
경제성	15. 사토장 조사에서 4개소를 선정하여 보고서에 수록하였는데 다른 공정과 연계하여 사토량에 따른 사토장별 수용가능량을 고려하여 운반거리를 최소화 할 수 있는 방안을 보고서에 명기하고 또한 발생한 토사를 유용할 수 있는 방안도 명기하시기 바람.
환경성	16. 공사 중 비산먼지 및 소음 방지를 위한 계획을 수립하고 도면에 표기하시기 바람. 17. 공사 중 차량 진·출입시 도로오염 방지를 위한 세륜·세차시설 등의 설치 계획을 수립하시기 바람. 18. 복우천 복개구조물 및 식생블럭 공사 중 하천 오염 방지를 위한 대책을 강구하시기 바람. 19. 토공 작업 중 토사 유출 방지를 위한 침사지등의 계획을 수립하시기 바람.
기 타	20. 배수계획에 따른 수리계산 근거를 보고서에 수록하시기 바람. (구조계산서에 있음) 21. 절취부를 포함하여 배수 시설 관련 방재와 연하여 검토되었는지와 빗물 저류 시설 등도 검토되었는지 확인하시기 바람. 22. 포장 단면도를 도면에 표기하시기 바람. 23. 현황측량도는 도면에 있는데 좌표망도를 도면에 표기하시기 바람. 24. 계측기 설치 계획을 도면에 표기하시기 바람. 25. 운행선 인접공사에 대한 안전대책 수립 요망	추가

2017년  9월  11일

심의위원 :   안  삼  현   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 철도

항 목

채   택   의   견

비  고

계획성

1. 본 정거장은 변위가 심한 자갈도상에 곡선부 승강장 설치구간이므로 기존선로 조사 및 궤도정정 설계반영 필요

(1) 기존 선로의 장기적인 궤도 유지보수 및 변위발생에 따른 준공도와의 차이를 고려한 곡선부 승강장 설치를 위해 기존선로에 대한 정밀 측량 및 조사가 필요함.

- 기존선형의 캔트조사가 필요하며, 유무에 따라 선형조정 뿐 아니라, 캔트조정에 대한 부분도 설계 반영하여야 함.

- C=23mm는 계산 값으로 일반적으로 시공시 캔트는 10mm 단위로 부설함. 부설 캔트 제시 필요.(정거장 구간으로 무캔트 설계 반영 검토 필요)

- 캔트 적용시 캔트체감구간이 필요하나, 현재 선형계획은 완화곡선이 없는 원곡선 구간으로 캔트 적용시 캔트체감구간 설계반영 필요

- 궤도정정에 대한 시공계획 없음(궤도정정 방법, 장비사용 및 이동 계획, 자갈보충, 궤도정정 연장 등)

보고서 참조

P78∼79

보완

시공성

2. 설계도 및 상세 추가보완 필요

(1) 계단 및 E/S 설치에 따른 승강장 상부슬래브 오픈부 거더 및 구조 상세도 추가보완 필요

(2) 복우천 통과구조물 슬래브 배근도 추가 보완 필요

(3) 흙막이 가시설(어스앵커 설치부) 종단면도 추가 보완 필요

(4) 승강장 하부 U형측구(뚜껑형) 하부 H-Pile 설치시 방수상세 필요

(5) 승강장 박스내부, E/V 및 E/S PIT부에 대한 배수계획 수립 및 상세도 추가 필요함.

토목도면 참조

(1) C-12~19

(2) C-21, 22

(3) C-31, 32

(4) C-26, 49

(5) 도면 C-10∼13

도면 C-20, 39

안전성

3. 설계 적정성 검토

(1) 승강장 하부 원지반과 성토지반이 동시에 지지되는 일부구간의 경우 지반의 다짐도가 상이함에 따라 부등침하가 발생할 가능성이 있으므로 이에 대한 추가 검토 또는 보완 필요 (지반반력이 적더라도 운행중인 열차의 진동에 의한 처짐 영향 등)

(1) 토목도면

- 횡단면도 참조

기타

4. 관련계획 수정 필요

- 관련계획검토 내용 중 상위계획 및 수도권 관련계획의 개정사항 수정 필요

구 분	토목보고서	개 정
국가 상위계획	국가기간교통망 계획(2000~2019)	국가기간교통망 제2차 수정계획(2001~2020)
	국가철도망 구축 기본계획 수립	제3차 국가철도망 구축계획(2016~2025)
수도권 관련계획	대도시권 광역 교통 기본계획(2007~2026)	대도시권 광역교통 기본계획 변경(2013~2020)
…	…	…

5. 선로 설계기준이 상이함으로 수정 필요

- 보고서(P73) : W=24,000 / R

- 도면(C-04) : W=20,000 / R

6. 승강장 부분 건축한계 유지방안 검토

- 궤도중심에서 승강장까지의 건축한계 기준을 「서울시 도시철도 건설기준」에 따라 콘크리트도상에 대한 건축한계 기준을 적용하였으나, 본 과업구간은 자갈도상의 곡선승강장이므로 궤도변위로 인해 열차가 승강장에 저촉되지 않도록 유지관리 방안 수립 등 상세설계 반영 필요.(예산이 허용되면 콘크리트도상 검토 필요함)

4. 보고서 P13

5. 보고서 P73

도면 C-04

6. 보고서 P75∼76

보완

2017년  9월  11일

심의위원 :   김  배  식   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 조경

항 목	채 택 의 견	비 고
관련법령 적용 적합성	1. 시방서와 내역서 작성시 조경공사 대가기준 적용 검토 (서울시, 2015) 2. 옥상조경은 서울시 옥상녹화시스템 설계도서 작성지침 검토 적용
계획성	3. 지상부 휴게시설 검토가 필요함 (1) 등벤치는 장기 체류자등 우려되므로 평벤치로 변경 검토. 4. 옥상층 조경 검토 수정이 필요함 (1) 식재기반조성을 위한 식재 경계부 마감 계획 누락되어 보완이 필요함 (2) 일부 녹음수 식재 토심확보를 위한 마운딩 검토가 필요함 (3) 방수와 배수 등 검토가 필요함 5. 옥상층 휴게공간주변 식재 검토 수정이 필요함 (1) 그늘제공을 위한 녹음수 식재 검토가 필요함 (2) 녹음수 선정시 인공지반, 옥상층의 환경에 적합한 수종선정이 바람직함. 6. 실내수목 계획도가 누락됨 (1) 실내수목 배치도 보완 및 수량수정이 필요함
시공성	7. 옥상부 마감레벨 재검토 후 수정이 필요함 (1) 계단 및 ELV의 입구와 바닥레벨의 검토 후 무장애 공간으로 조성 (2) 출입구 연결부를 통한 빗물유입이 안되도록 마감처리 검토필요 8. 옥상층 포장 (1) 식재대와 포장재 경계부에 마감처리가 누락되어 이에 대한 검토가 필요함
유지관리	9. 옥상 점검구 (1) 점검구 세부상세 누락되어 추가보완필요 (2) 점검구에 접근시 수목피해가 없도록 위치 검토 10. 수목시비기준을 조경공사 대가기준에 맞게 검토 후 수정보완 (1) 예) 교목 수고 1.5m 이하 2kg → 수고 1.0∼2.0m 5kg (2) 대가기준에 맞게 교목, 관목 등 시비량 수정보완이 필요함
안전성	11. 옥상층 포장 (1) 화강석 판석(버너마감)은 불투수포장으로 눈이나 비가 올 때 미끄러짐 등 안전사고가 우려되므로 투수성블럭 포장으로 변경 검토가 필요함
경제성	12. 관목 및 초화류 식재밀도를 조경공사대가기준(2015. 서울시)에 맞게 재조정 (1) 꽃댕강나무 w 0.4 16주/㎡ → 9주/㎡ (2) 회양목, 백철쭉, 영산홍 w 0.3 25주/㎡ → 16주/㎡ (3) 초화류 식재밀도 재조정(예; 비비추 8cm 49주/㎡→ 4-5분얼 25본 등으로 대가기준에 맞게 수정보완 13. 옥상 앉음벽(석재) (1) 통석 → 목재마감(각 파이프 틀)로 변경하여 경제성 및 쾌적성 향상이 바람직함.(하중 고려 재검토가 필요함)	보완
환경성	14. 옥상 식재기반 도누락 (1) 옥상 식재기반도를 추가보완(식생가능 토심확보) (2) 옥상배수 연계성 검토
기 타	15. 시설물 상세도면 누락되어 보완수정이 필요함 16. 세부 내역서가 누락되어 보완수정이 필요함

2017년  9월  11일

심의위원 :   이  원  아   (서명)

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 위례신도시 8호선 추가역 건설사업 설계심의

◦ 분    야 : 총괄

[건축]

항 목	채 택 의 견	비 고
관련법령 적용 적합성	1. 동바리, 거푸집, 비계 등 가설구조물에 대한 구조검토를 포함하여 설계도서(설계물량, 규격, 재료, 공법 등)를 작성할 것 (건설기술진흥법 제48조제5항, 건설현장 가설구조물의 안전관리 강화 계획, 2015.11.6. 행정2부시장 방침 제376호 참조) 2. 시설물 설계시 우리시 ‘유니버설디자인 도시조성 기본 조례’ 규정에 적합한 설계가 되도록 하고(대상 시설별 검토결과서 제출), 장애물 없는 생활환경 인증제도(Barrier Free) 설계 적용 내용을 설계보고서에 수록할 것 ※ 검토기준 : 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인 체크리스트 3. 단열재 및 창호의 종류 및 등급(성능, 열관류율 등)을 표기하고 부위별 ‘건축물의 에너지절약 설계기준’ 적합여부를 확인할 것
계획성	4. 시설의 이용에 편리하도록 전체 시설에 대하여 표지 체계를 계획할 것(부대시설 이용 유도 안내, 주차장 유도, 바닥, 기둥, 천정 등 안내 Sign) 5. 화장실은 여성 및 어린이를 배려한 우리시 여행화장실 표준 모델 기준에 적합하게 설계하고 기준 적합여부를 검토할 것 - 장애인용화장실은 다양한 이용자를 위한 다목적화장실로 계획 - 다목적화장실 내부에는 간이의자, 기저귀교환대, 성인용변기 및 어린이용변기, 간이세면기, 노약자를 위한 핸드레일과 선반, 비상호출을 위한 설비 등을 설치 - 노약자 및 여성을 위한 비상벨, 화장실 사용여부 인식표시, 손 건조기, 대소변기 및 세면대 상부(주변)에 소지품을 올려놓을 수 있는 선반 등 이용 편의시설 계획 등 6. 여객화장실 확대평면도를 작성할 것 7. 용역대기실은 우리시 ‘청소근로환경시설 가이드라인’ 기준에 적합하게 계획할 것 - 1인당 5㎡ 내외의 공간 확보(휴게실은 바닥난방 필수) - 휴게실, 탈의실, 샤워실, 세탁실을 복합적(일체형)으로 구성 - 청소근로자의 동선을 고려하여 작업공간과 인접하여 배치 - 사무근로자와 동선이 혼재되지 않도록 독립적으로 설계 - 남녀 고용규모 등에 따라 남녀 구분 설치 등
시공성	8. 경량철골천장틀 상세도를 작성하고 경량철골천장틀의 뒤틀림 방지 등을 위해 마이너찬넬 등의 설치간격을 도면에 명기할 것
유지관리	9. 화장실의 유지관리를 위한 별도의 청소도구함(씽크조 포함) 계획을 검토할 것 10. 화장실, 샤워실 벽면에 최소 1.5m 이상 내벽 방수를 검토할 것 11. 우리시 ‘공동주택 등 하자발생 최소화 및 기술심의 내실화 방안’ (기술심사담당관-9731, `15.6.1)의 중점관리 체크리스트에 의한 자체 확인 결과를 설계에 반영할 것(확인 결과 제출)
안전성	12 설계보고서에 ‘구조안전 및 내진설계 확인서’를 수록할 것 13. 건축구조계산서에 페이지 번호 누락 14. 지반분류, 중요도계수, 내진설계범주가 ‘내진요약 보고서’, ‘건축구조계산서 1.7 하중조건’, ‘동적해석 결과에 대한 보정계수 산정표’에서 일치하지 않음 15. 건축구조도 일반사항(S-00-001)의 내용(구조설계기준, 사용재료, 기초의 종류 등)이 본 설계와 관련 없는 내용으로 일반사항 전반에 대하여 오류를 수정할 것 16. 2층, 3층, 지붕층 구조평면도에 기둥 기호 누락 17. 구조평면도 SRC 기둥 구분 표현 18. 기둥 일람표에 C1 기둥의 층별표시 누락 19. 계단배근도, 잡배근도 누락 20. 구조계산서와 구조도면의 불일치 사항(부재 기호 불일치 등) 및 누락 사항 전반에 대하여 확인 후 수정할 것 ※ 건축구조도가 전반적으로 미흡하니 구조설계자의 검토·확인을 받아 오류를 수정할 것 21. 난간(옥상난간 포함) 설치도면(부분상세도 등)이 없으니 보완할 것 - 난간은 디자인 요소를 추가 부식되지 않는 재료를 사용하고 추락방지를 위하여 수직형 난간살 형태로 설치할 것. 22. 너비 3m 초과 계단의 중간에 난간 설치를 검토할 것
환경성	23. 녹색건축 인증, 에너지효율등급 인증, BF 인증 적용 내용을 설계도서(보고서)에 수록할 것	수정
기 타	24. ‘건설공사의 설계도서 작성기준’(국토교통부)의 성과품 작성기준을 참고하여 표기하여할 사항을 누락 없이 각 공종별 설계도면, 설계설명서 등에 보완하고, 분야별 참여기술자 참여기간, 용역수행 내용 등을 자세하게 표기하고 서명날인 할 것 25. 기타 오류 수정 - 국토해양부(A00-001) → 국토교통부

[토목]

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	26. 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토와 관한 지침(국토교통부 고시)에 따라 전체 공정계획과 연계한 토목분야 공종별 개략공사비 및 공기 산정 결과를 보고서에 추가할 것 27. 토목시방서에 승강장 프리캐스트 설치공사(UNION PC공법)에 대한 시방기준을 추가할 것 - 승강장 프리캐스트 설치공사가 토목분야에서 중요한 공종이며 특히 건설신기술 지정을 받은 공법을 적용하고 있음에도 시방기준이 누락되어 있으므로 정밀시공을 위하여 토목시방서에 해당 공법에 대한 시공기준을 추가할 것
시공성	28. 토목도면 C-31 가시설 평면도상 A-A구간은 어스앵커와 옹벽#1의 설치위치가 중첩됨에 따라 공종간 간섭이 발생될 우려가 있으므로 시공시 혼란을 방지하기 위하여 횡단면도를 작성할 것 29. 토목도면 C-40 포장 및 부대시설도상의 포장계획은 단순 포장면적만 제시하고 있으므로 도로폭 및 측구, 포장층 등이 명시된 표준단면도를 작성할 것 - 조경도면 L-006 포장단면/식재지주목 상세도에서 도로부 포장층이 화강석판석(THK30)으로 설계되어 있는 반면, 토목 보고서 p.136에서는 아스팔트콘크리트 포장으로 제시되어 있으므로 관련분야의 설계영역을 명확히 구분할 것
유지관리	30. 승강장 시공 공법인 프리캐스트 설치공사(UNION PC공법)의 타 적용현장을 참조하여 열차 진동에 따른 프리캐스트 볼트체결부위의 이완사례가 있는지 확인하고 방지 대책을 검토할 것 31. 지수재 및 그라우팅 등 프리캐스트 접합부 방수대책을 검토하고 관련도면에 표현할 것 - 그라우팅 재료 및 주입압력 등 시공시 유의사항에 대한 주기를 작성할 것
안전성	32. 토목 구조계산서에 옹벽에 대한 구조계산 결과가 누락되어 있으므로 구조물의 단면설계 및 철근량 산정 등에 대한 근거를 확보하고 설계의 안전성을 확인할 수 있도록 옹벽 구조계산을 추가할 것 33. 토목 구조계산서 중 상행승강장 구조계산 내용에 단면 휨 설계, 수평·전단철근 및 사용성(균열) 검토 결과 등 구조계산 요약표를 작성할 것 34. 토목도면 C-23, C-24 옹벽일반도에서 옹벽 배면에 작용하는 수압 저감을 위하여 배수공을 설치하였으나 일부구간은 노출벽체의 높이가 4～5m 이상이므로 우기시 작용수압 등을 고려하여 배수공 추가설치를 검토할 것
경제성	35. 승강장 프리캐스트 시공 공법인 UNION PC(건설신기술 제606호)의 개략공사비 산정내용을 수정할 것 - 보고서 p.86에서는 22.2억원(야간 2.5시간 시공기준)으로 산정되어 있으나 부록 4. 신기술공법 현황자료에서는 21.74억원으로 제시되어 있으므로 설계내역 검토 후 수정할 것

[기계설비]

항 목	채 택 의 견	비 고
관련법령 적용 적합성	36. 신재생에너지 적용비율 확인 : 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령 [별표2]에 따라 2017년 기준 21% 이상 적용여부 확인 적용할 것 37. 소방 설비 대피안전성 시뮬레이션 분석을 통해 피난연결통로 간격의 적정성을 제시할 것.
계획성	38. 기계,소방 설계도 M2*******002 범례표 수정 할 것 - 차압밸브, 2way 밸브 등 도면에 표현된 심벌 전체 표기 39. 기계,소방 설계도 M2*******003 장비일람표-1 수정할 것 - 지열히트펌프 NOTE 표기 수정 - 지열히트펌프는 실외측 온도조건이 필요 없으므로 삭제 / 응축기 입, 출구온도 표기 - GSHP-1 : 소비전력 계산서와 상이, 일치시키기 바람 40. 기계,소방 설계도 M2*******004 장비일람표-2 수정할 것 - 물탱크실/공조기계실 급/배기 풍량 밸런스를 맞추기 바람 급기(F-2/3) - 6,900 CMH + 2,100 CMH = 9,000 CMH 배기(F-1) - 6,680 CMH - 급기송풍기와 배기송풍기 모두 자동제어에서 제어할수 있도록 변경 - 지열차특 순환펌프 P-4 계산서에 내용없음, 계산서에 내용 추가 41. 기계,소방 설계도 M2*******005 장비일람표-3 수정할 것 - EV-2는 형식에 관통형을 표기하고, 정지층수 3층으로 적용 검토
시공성	42. 기계,소방 설계도 M2*******001 옥외배관 평면도 수정할 것 - 시 상수도 인입관 D80은 건축물 규모에 비하여 큰 것으로 사료됨. 적정관경으로 변경검토 필요 43. 기계,소방 설계도 M2*******002~006 공조덕트 평면도 수정할 것 - 전기실, 통신기계실 등은 소화약제설비 적용여부 확인 필요 44. 기계,소방 설계도 M2*******002~003 지상1층 위생배관 평면도 수정할 것 - X4~8/Y3 의 천장배관은 옥외 노출되는 배관이므로 열선 반영 45. 소방설비 내진설계 상세도 추가 할 것 - 옥내 소화전함, 청정소화약제설비 등
기 타	46. 실시설계 시 타분야 상호 연결된 부위 인터페이스를 철저히 조사하여 누락되는 부분이 없도록 하기 바람 47. 소방설비 중 화재시 소화전사용법을 인지하기 쉽도록 소화전함 명판 상세도를 텍스트 방식에서 그림+텍스트 방식으로 변경하여 적용 할 것.

[전기설비]

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	48. 변압기 용량 산정은 기계(동력) 설비, 건축(인테리어 조명 등)설비 용량을 확인하고, 용량산정에 누락되지 않도록 보완할 것. 49. 과업내용서 설계조건에 포함된 각종 용량계산서에 단락전류계산서, 트레이용량계산서, 조명설비 시뮬레이션 결과를 추가할 것.
시공성	50. 설계도면 중 다음의 사항에 대하여 보완할 것. - ‘범례 및 주기사항-1, 2(E-002.003)’에 본 사업과 관련이 없는 범례(Symbol), 주기사항은 삭제할 것. - ‘지상1층 전력간선설비 평면도(E-014)’케이블트레이 규격이 누락되었으므로 보완할 것. - ‘옥외전등설비평면도(E-036)’옥외보안등 등주기초 설치에 대한 상세도를 추가하고, 터파기 심도는 수정할 것 • 일반 : 700 → 600 • 횡단개소 : 1300 → 1000 - ‘조명제어설비 계통도(E-056)’에 조명 디밍제어방식에 대한 시공범위, 시공방법 등에 대한 시공 상세내용을 추가할 것.
유지관리	51. 향후 유지관리를 위한 전기실 저압반과 분전반 예비차단기는 각 판넬별로 예비회로를 적정하게 구성할 것.
안전성	52. 전기실 유지관리자의 안전성, 편리성 확보를 위하여 수배전반 설치시 수배전반(문짝 열림상태)과 벽면간의 이격거리를 충분히 확보하고, 전기실 장비배치 평면도(E-006)에 표기할 것. 53. 전기실 수배전반(특고압 및 저압반 등)에 대한 내진설비 및 설치 상세도를 작성할 것. 54. 변압기반 및 저압반에 적용된 배전반 자동소화장치에 대한 규격 및 설치 상세도를 추가할 것

[조경]

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	55. 건축계획과 연계하여 공간별 조경 개념 및 구체적인 설계 내용을 체계화하여 보고서에 정리할 것 56. 식재 수종 선택 및 주요 조경시설물의 재료, 공법 등 선정 과정에 대한 검토 내용을 보고서에 작성할 것 57. 주요 조경공간의 확대도면, 입단면도를 작성하여 전반적인 공간 구조 및 배식, 포장패턴의 연결 등을 나타낼 것 58. 2층 실내조경은 수종별 식재 위치를 알기 쉽게 표현할 것 59. 옥상층의 조경 평면도를 확대하고 배수체계도를 표시할 것 60. 인공지반 식재시 충분한 토심을 확보하고 방수․방근․배수시설 등을 구조물과 연결하여 입단면도를 작성할 것 61. 스트로브잣나무는 도시경관에 어울리는 수종으로 변경 검토할 것 62. 앉음벽 상부는 이용자 선호를 고려하여 목재로 검토하고 앉음벽 석재의 구체적인 재료명을 명시할 것 63. 플랜터, 앉음벽, 파고라 등의 상세도를 추가할 것
시공성	64. 앉음벽, 포장 등 조경시설물에 대해서도 시방서를 작성할 것
유지관리	65. 층별 급․관수 체계도를 작성하고 인력관수 시 쉽게 이용할 수 있는 급수 위치, 방법 등을 도면 또는 보고서에 명시할 것

2017년  9월  11일

심의위원 :   김  홍  길   (서명)