구민이 주인되는 희망강북!
		강북구
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(인수봉로23가길 등 노후 하수관거 정비공사)

우리구에서 시행중인「인수봉로23가길 등 노후 하수관거 정비공사」에 대하여 아래와 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 인수봉로23가길 등 노후 하수관거 정비공사

2. 공사기간: 2017. 05. 02. ~ 2017. 10. 31.

3. 도 급 자: ㈜서우디자인  대표 전민호

4. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	685,732,000	794,797,000	증 109,065,000
도 급 비	666,074,000	788,381,000	증 122,307,000
이 전 비	19,658,000	6,416,000	감 13,242,000

5. 예산과목

- 하수기반시설의확충및정비, 하수관거정비 및 준설사업 지속추진, 인수봉로23가길 등 노후 하수관로 정비공사, 시설비(시비-특별교부금)

※ 단순 물량증감 사항으로 일상감사 및 계약심사 비대상

붙임: 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경(정산)내역서 1부.

3. 제비율 검증 1부.

4. 설계변경내역서 갑지 1부.  끝.

★주무관							김산				치수팀장					이광철					안전치수과장					함명수					건설안전교통국장						전결 09/15 代유영채
협조자				계약팀장							남정우					재무과장							김영모
시행			안전치수과-16809										(						)		접수												(						)
우	01133					서울특별시 강북구 솔매로49길 14(미아동)																/			http://www.gangbuk.go.kr
전화		02-901-5894							/전송			02-901-5880					/														/	부분공개(5)