문서번호	물재생시설과-14010
결재일자	2017.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	물재생운영팀장	물재생시설과장
박만헌	정훈모	09/20 이철해

2017년 사업비(시설분야) 집행잔액

승인요청 관련 검토 보고

2017. 9

물순환안전국

(물재생시설과)

2017년 사업비(시설 분야) 집행잔액 승인요청 관련 검토 보고

1		요청현황

❍ 건    명 : 시설비 사업 집행잔액 사용승인 요청(건설폐기물 부문)

※ 붙임 탄천2017-499호(2017.9.14) 관련임

❍ 요청기관 : ㈜탄천환경

❍ 요 청 액 : 22백만원 (※ ‘17.9 현재 시설비 집행잔액 : 575백만원)

건 명	사업개요	사 유	승인요청액 (백만원)
건설폐기물 물량 추가 발생	- 건설폐기물 처리 600톤, 기타	제2처리장 도로 정비 관련 폐기물 추가 발생 등	22

❍ 세부내용

구 분	계약물량	변경물량	폐기물량 (예상)	부족물량	비고
폐콘크리트	900	1,100	1,100	-
폐아스팔트 콘크리트	100	300	950	650
혼합건설폐기물	195	50	70	20
소요예산 (백만원)	43,749	43,749	72,400	22,400

2		현황 및 검토결과

❍ 제2처리장 주변 도로정비 등에 따른 건설폐기물 추가 발생으로,

본 폐기물 연내 신속 처리를 위해 ㈜탄천환경에서 요청한 추가

비용(22백만원) 승인이 필요하다고 판단됨.

3		조치의견

❍ ㈜탄천환경에서 제출한 계획에 따라 용역 시행토록 요청 사업비

(22백만원)를 승인코자 함

4		향후계획

❍ 2017. 9 : ㈜탄천환경에 사업비 승인 통보

❍ 2017.10 : 용역 시행

붙임 : 관련 공문 및 사용계획서 각 1부. 끝.