문서번호	자치행정과-23159			★주무관		자치행정팀장		자치행정과장		행정관리국장
결재일자	2017.9.21.
				윤상근		김준영		안승길		09/21 代안승길
공개여부	대시민공개
				협 조	공공시설팀장		권종출
보도여부
					주무관		양성길		번제3동장			김희수
					주무관		호은성		정보통신팀장			정재옥
		번3동 주민센터 승강기 설치 계획
2017.9.20.
강 북 구

번3동 주민센터 승강기 설치공사 계획

승강기가 설치되지 않은 번3동 주민센터에 승강기를 설치하여 동주민센터를 이용하는 장애인, 노약자 등 보행약자의 접근성을 높이고 편의를 증진하고자 함.

Ⅰ		사업개요

기    간 : 2017. 10월 ~ 2018. 5월

대    상 : 번3동 주민센터(한천로 105길 21)

사업내용

승강기 설치 구간 외벽 일부 철거 및 보강공사

외부 승강로 구조물 및 승강기 설치(15인승, 장애인 겸용, 지상 1~3층)

예    산 : 266,900천원

예산과목 : 자치행정과, 자치행정역량강화, 주민센터 환경개선,

동청사 개보수 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅱ		세부추진일정

2017. 10월 : 설계용역 계약심사, 발주 및 계약

2017. 11월 ~ 12월 : 설계용역 시행, 설치공사 일상감사 및 계약심사

2018. 1월 ~ 2월 : 공사 발주 및 계약

2018. 3월 ~ 5월 : 착공 및 준공

Ⅲ		행정사항

설계용역 및 공사 감독 협조 : 정보화지원과(통신), 건축과(건축, 기계, 전기)

붙임  번3동 주민센터 위치도 및 현장사진 1부.  끝.