10월 안전점검 대상공사장

연번	공사명(공구명)	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준공 예정일	공정(%)	비고
계	도시기반시설본부	61개 공사장	토목부25, 건축부11, 방재시설부10 도시철도 사업부3, 토목부10, 설비부2
소계	시 설 국	46개 공사장	토목부25, 건축부11, 방재시설부10
	토 목 부	25개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,826	2001-12-29	2019-11-30	73.8
2	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로	2,351	2002-07-03	2018-07-31	42.5
3	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km(지하차도 2개소, 옹벽)	1,704	2008-12-30	2017-12-31	48.5
4	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km(지하차도 2개소 등)	558	2008-02-15	2017-12-31	70.8
5	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	2,403	2010-03-22	2020-08-30	43.9
6	도시고속도로연결램프(정릉길)설치공사	신설램프 120m, 본선확장 82m	89	2013-12-01	2017-12-29	89.0
7	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	532	2010-10-11	2017-12-31	54.7
8	선사로~고덕지구간 도로확장공사	B=8m→25m, L=3.72km	354	2009-01-06	2017-10-31	97.3
9	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	775	2010-10-11	2017-12-31	89.9
10	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	L=3.1km (터널 1,714m BOX 756m U-Type 130m, 토공 500m)	2,113	2010-10-05	2017-12-30	0
11	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km(폭원 왕복 4차로)	1,695	2010-10-08	2017-12-31	35.3
12	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)	도로연장 : 5.194km,(설계속도 : 80km/h) (터널 : 4.094km(병렬터널), 개착 : 1.1km)	3,358	2016-03-01	2021-02-28	12.0
13	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	연장 L=5.136km (터널:3.808km, 개착박스 0.430km, U타입 0.160km)	2,561	2016-03-01	2021-02-28	7.4
14	석촌지하차도 상부도로 구조개선공사	교량설치 B=22.5m, L=31.5m 회전교차로 설치 1개소	20	2016-03-02	2017-10-30	85.0
15	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	램프신설 : L=1,383m, 램프이설 : L=1,309m 올림픽대로 이설 : 하남방향(1.21㎞), 김포방향(1.46㎞)	264	2016-04-01	2019-12-11	23.3
16	광복교~안양교 도로확장공사	도로확장 B=24.5m~31.9m, 6차로, L=1,110m 광복교 보도설치, 안양교 철거 및 신설	432	2016-04-01	2019-09-12	22.4
17	남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사	도로개선 : 폭 30.0m(6차로), 연장 1.1㎞ 교량개축 : 폭 22.0m → 31.4m, 연장 38.0m	154	2016-04-25	2019-03-24	19.9
18	중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사	보행교량 신설(B=4.5m, L=191m)	52	2016-04-29	2018-04-28	32.6
19	여의교 확장공사	확장(폭 8차로→9차로, 연장 240m) 및 교차로 개선, 보행교량 신설(폭 4m, 연장240m)	44	2016-11-30	2018-05-29	40.6
20	퇴계로 외 1개소 도로공간재편공사	퇴계로 B=5.5m→6.0~14.0m,L=850m 만리재로 B=4.0m→6.0~10.0m, L=1,170m	28	2017-01-04	2017-12-31	18.2
21	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	램프신설:L=712.6m(교량 235.0m, B=6.4m, 옹벽=477.6m), 이설 : 김포방향 1차로	94	2016-11-30	2018-11-29	20.9
22	성산대교 북단 성능개선공사	접속교(B=27m, L=212m) 램프 2개소 - 구조물 보수보강, 슬래브 교체, 가교설치	168	2017-03-23	2018-04-22	4.1
23	밤고개로 확장공사	도로확장 6 → 7~8차로(총연장 1.845km)	92	2017-05-18	2018-12-30	3.9
24	장지지하차도~동부간선도로간 연결도로설치공사	진입신설 Ramp-A L=638m , 1차로(B=6.0m) 진출신설 Ramp-B L=455m , 1차로(B=6.0m)	364	2017-06-13	2019-09-30	6.5
25	종로 중앙버스전용차로 설치공사	연장 L=3.8km, 정류소 15개소 설치(고정식 2개소, 이동식 13개소)	21	2017-08-29	2018-04-30	0
	건 축 부	11개 공사장
26	세운상가 활성화를 위한 공공공간조성공사	공연장 741㎡, 초록띠공원 3,748㎡ 및 플랫폼쉘39개 등	210	2016-03-24	2017-10-30	99.0
27	서울기록원 건립공사	규모 : 지하2층, 지상5층 연면적15,004.0㎡ 구조 : 철근콘크리트조	142	2016-04-20	2018-04-19	30.0
28	서울 소방행정타운 건립공사	대지:48,950.10㎡, 건축:6,648.06㎡,연면적:25,174.81㎡, 건물구조:철골철근콘크리트, 지하2층 지상15층	312	2016-05-18	2018-05-17	59.7
29	장안평 자동차산업 종합정보센터 건립공사	지상3층, 총면적1,088㎡(997㎡증축)	14	2016-10-10	2017-10-10	92.1
30	세종대로일대 역사문화 특화공간 조성공사	지하3층/지상1층, 연면적 2,899.89㎡ 문화및집회시설(전시장)	82	2016-10-26	2018-04-25	27.3
31	봉제박물관 건립공사	규모 : 지하1층, 지상3층, 연면적 499㎡	11	2016-12-05	2017-12-04	77.0
32	서울창업허브 별관 리모델링공사	규모 : 지상4층, 연면적5,656.93㎡	47	2016-12-09	2018-01-02	34.5
33	서울혁신파크 1단계 조성공사(장기계속)(1차)	9,10,15동 12,608㎡ 리모델링, 11,13동 철거 홈베이스 829.55㎡, 변전소 111.05㎡ 증축	95	2016-12-30	2017-12-15	44.0
34	체부동 생활문화센터 조성공사	지상1층79.34㎡(한옥), 지상2층340.82㎡(교회)연면적 420.16㎡ 리모델링	6	2017-05-31	2017-12-30	48.6
35	북한산성 대성문 해체보수공사	대성문 육축 및 문루 전면 해체 보수	12	2017-02-28	2018-08-27	12.1
36	한양도성 숙정문 해체보수공사	문루 해체 보수 등	3	2017-04-19	2018-01-13	16.0
	방재시설부	10개 공사장
37	제물포터널 민간투자사업(1공구)건설공사	총연장 : 4.28km, 지하차도:660m / 2개소 터널:7,640m/2개소, 기타 부대시설	2,304	2015-10-16	2020-10-15	13.2
38	제물포터널 민간투자사업(2공구)건설공사	총연장 : 3.25km, 지하차도:694m / 2개소 터널:5,846m/2개소, 기타 부대시설	3,016	2015-10-16	2020-10-15	23.6
39	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	3,125	2009-11-09	2018-12-31	65.9
40	잠원2빗물펌프장 신설공사	잠원2빗물펌프장 :펌프장 신설 1,400㎥/분, 집수조 V=15,500㎥	135	2013-01-03	2018-02-28	94.2
41	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사	수직구:6개소(저지2,고지1,환기1,유출1,유지관리1) - 저류:L=3.629km,D=10.0m 유도:L=1.097km,D=5.5m	1,083	2013-05-27	2018-01-22	58.7
42	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)	길이(1.1㎞) 면적(53,860㎡)	35	2017-01-02	2017-10-31	68.2
43	서초역~방배로간 도로개설공사	도로개설 폭40m(6~8차로), 연장 1.28km(터널 355m포함)	539	2015-10-20	2019-01-31	57.8
44	양재대로 녹지연결로 조성공사	녹지연결로 : 폭20m, 총 연장 90.65m - DPS합성형교 B=20.0m L=52.6m	44	2016-06-20	2017-10-30	88.9
45	청계천 생태환경 개선공사(2단계)	진출입 경사로 설치(2개소), 홍수방지벽(L=145m) 및 산책로 정비(L=3,246m)	8	2016-08-26	2018-02-25	56.7
46	양평1유수지CSOs저류조 설치공사	CSOs저류조 설치 46,000㎥	80	2016-12-05	2019-08-30	60.5
	도시철도국	15개 공사장	도시철도사업부3, 도시철도토목부10 도시철도설비부2
	도시철도사업부	3개 공사장
47	신림선 도시철도 1공구 건설공사	L=2,287m(정거장 4개소, 환기구 1개소)	1,250	2017-02-01	2022-01-30	3.1
48	신림선 도시철도 2공구 건설공사	L=3,002m(정거장 4개소, 환기구 3개소, 차량기지 1개소)	2,053	2017-02-01	2022-01-30	5.2
49	신림선 도시철도 3공구 건설공사	L=2,471m(정거장 3개소, 환기구 1개소)	1,071	2017-02-01	2022-01-30	4.0
	도시철도토목부	10개 공사장
50	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	746	2015-03-17	2019-03-28	37.0
51	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	405	2015-03-30	2018-07-10	54.4
52	지하철9호선 918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,419	2010-02-19	2018-05-30	91.5
53	지하철9호선 919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2018-05-30	81.1
54	지하철9호선 920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2018-05-30	84.3
55	지하철9호선 921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,773	2009-12-31	2018-05-30	80.2
56	지하철9호선 922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,329	2010-09-16	2018-05-30	88.3
57	지하철9호선 923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	1,018	2010-09-20	2018-05-30	89.4
58	지하철9호선 3단계 궤도공사(1공구)	궤도부설 L=9.482km(콘크리트도상, 단선기준) 분기기 부설 11틀	65	2016-09-26	2017-12-25	81.4
59	지하철9호선 3단계 궤도공사(2공구)	궤도부설 : 10.084km(콘크리트도상) 분기기부설 : 12틀(RC 분기기)	68	2016-06-13	2017-12-22	86.4
	도시철도설비부	2개 공사장
60	지하철9호선 3단계 정보통신공사(1구간)	본선 3.984km(32k000.000~35k984.000) 정거장 4개소(931~934정거장)	57	2015-01-13	2018-01-11	54.6
61	지하철9호선 3단계 정보통신공사(2구간)	본선 6.544Km(34k984~41k528) 정거장 4개소(935~938)	56	2014-12-31	2018-01-11	66.3

(2017년)