“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	교통정책과-17552		주무관	신교통추진팀장		교통정책과장		안전교통국장
			백승만	이성노		代황선재		전결 09/22 代신동업
등록일자	2017.9.22.
결재일자	2017.9.22.
공개구분	부분공개
			협조자
					재무과장		정한호
					계약팀장		박성희

- 주택가 주차난 해소와 쾌적한 주거환경 조성을 위한 -

2017년 녹색주차마을 조성사업(연간단가) 설계변경

o 설계변경사유 : 현장여건 및 완료내역 현장점검에 따른 시공물량 증·감 반영

- 주요변경사항

공 종	규 격	단위	당초	변경	증․감	비고
콘크리트 블럭포장	T=8㎝	a	6	10	증
도로경계블록설치	150*150*1000	m	700	350	감
수목제거	R20 이상	주	25	26	증

o 공사비 증감 내역                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
총공사비	287,272,600	287,272,600	-
도급비	219,496,600	228,496,600	증 9,000,000
관급비	44,811,000	35,811,000	감 9,000,000
이전비(폐기물처리용역비)	22,965,000	22,965,000	-

o 조치계획

- 현장여건에 따른 시공물량 변경사항 반영코자 설계변경(정산) 추진

2017.  9.   .

	강 남 구
(		교통정책과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 동법 시행령 제74조 제1항 • 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (안전행정부예규 제74호 2014) 제13장 공사계약일반조건 7-1 설계변경으로인한 계약금액의 조정 • 건설공사설계 설계변경 가이드라인(2014 서울시)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 공사량의 증감에 따른 계약금액 조정
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 2017 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준, 예산배정 • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구민전체
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

2017년 녹색주차마을 조성사업(연간단가) 설계변경(1차)

우리구에서 시행중인「녹색주차마을 조성사업(연간단가)」의 현장여건에 따른 물량 증․감 반영을 위해 설계변경(정산) 시행코자 함.

1		사업추진현황

o 추진목표 : 주차장 25가구 50면 조성

o 추진현황 : 주차장 13가구 50면 조성완료

2		공 사 개 요

o 사 업 명 : 2017년 녹색주차마을 조성사업(연간단가)

o 사업내용 : 주차장 25가구 50면 조성

o 사업기간 : 2017. 3. 16 ~ 12. 31.

o 예 산 액 : 326,000,000원[구비:299,000천원, 시비: 27,000천원(간주처리)]

o 도 급 비 : 219,496천원(관급자재비:44,811천원, 폐기물처리용역: 22,965천원)

o 도 급 자 : 범효건설 대표 오치식

3		보 고 내 용

o 설계변경 사유

- 공사완료내역 현장점검에 따른 물량 증·감 반영

※ 교통정책과-11633(2017.6.23.), -17445(2017.9.21.)

- 현장여건에 따른 공종별 주요 물량 증·감 반영(터파기 외 53개 공종)

- 주요 물량증·감 내역

공 종	규 격	단위	당초	변경	증․감	비고
콘크리트 블럭포장	T=8㎝	a	6	10	증
콘크리트포장 (레미콘)	T=15Cm,	a	3	1.84	감
수도관이설	D=25mm	m	8	10	증
도로경계블록설치	150*150*1000	m	700	350	감
수목제거	R20 이상	주	25	26	증

o 폐기물처리용역비 : 변경사항없음

o 공사비 증·감 내역

구 분		당 초	변 경	증 ▪ 감	비고
총공사비		287,272,600	287,272,600	-
도급비	공급가액	199,542,364	207,724,182	증 8,181,818
	부가가치세	19,954,236	20,772,418	증 818,182
	소계	219,496,600	228,496,600	증 9,000,000
관 급 비		44,811,000	35,811,000	감 9,000,000
이전비 (폐기물처리용역비)		22,965,000	22,965,000	-

(단위:원)

o 예산과목 : 교통정책과, 선진교통체계확충 및 정비, 강남교통비젼21

체계구축 및 주차편익시설건설(주차장특별회계),

녹색주차마을조성사업, 시설비및부대비, 시설비

4		조치 계획

o 상기 보고내용과 같이 현장여건에 따른 물량 증․감 반영을 위해 설계변경(정산) 시행코자함.

첨부 : 1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증 1부.   끝.