투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기 의뢰(노후동물사 기계설비 개선공사 - 급수설비 -)

1. 시설과-6058(’17.09.25.)호와 관련입니다.

2. 『노후동물사 기계설비 개선공사(급수설비)』 준공기한을 연기코자 변경계약 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 노후동물사 기계설비 개선공사(급수설비)

나. 계 약 자 : 지엠방재산업㈜ 대표 김영목

다. 준공기한 변경

구 분	변경 전	변경 후	비 고
공사기간	2017. 07. 10. ~ 10. 07.	2017. 07. 10. ~ 10. 25.	18일 연기

- 연기사유 : 동물사 현장여건의 문제로 공사기간 연장

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 공사기간 연기 검토보고 1부.

2. 합의각서 및 준공기한 연기의뢰서 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	09/25 오임석
협조자
시행	시설과-6064	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7423	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)