아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기)

우리과에서 시행중인 ‘동부간선도로 지하화 타당성 조사 및 기본계획용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 동부간선도로 지하화 타당성 조사 및 기본계획

2. 계약자 : ㈜경동엔지니어링 외 2개사

3. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경
총 차	2017.9.30	2017.12.22
2 차	2017.9.30	2017.12.22

4. 귀책사유 : 서울특별시

5. 연기사유 : 동부간선도로 지하화 민자사업 PIMAC 적격성 조사 결과와 연계하여 본 용역에서 세부 검토가 필요함에 따라 추가기간 소요

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 용역계약 변경합의서 1부. 끝.

	도로계획과장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	09/25 하종현
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로계획과-13869	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과	/
전화	02)2133-8065	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개