문서번호	도로보수과-9506
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
이석연	송광석	代송광석	09/26 송만규
협 조

기성준공(1회) 검토 보고

【2017년 포장도로(긴급·굴착복구) 노면표시 도색공사】

2017. 9.

동부도로사업소

도로보수과

기성준공(1회) 검토 보고

【2017년 포장도로(긴급·굴착복구) 노면표시 도색공사】

우리사업소에서 시행중인 『2017년 포장도로(긴급·굴착복구) 노면표시 도색공사』와 관련하여 건설사업관리 기관인 도로교통공단으로부터기성서류(1차) 제출에 따른 기성준공(제1회) 검토보고임

Ⅰ		관련근거

□ 설계변경(1회) 시행 : 도로보수과-9304(2017.09.21.)

□ 기성서류(1차) 제출 : 도로교통공단 안전시설부-5445(2017.09.26.)호

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2017년 포장도로(긴급·굴착복구) 노면표시 도색공사

□ 공사개요 : 차선 도색 L=105,455m

□ 공사기간 : 2017. 3. 10. ~ 12. 20.

□ 도 급 비 : 264,000,000원

□ 도 급 자 : ************

□ 공 정 률 : 53.3%

Ⅲ		기성내용

계약금액	전회기성금액	금회기성금액	누계기성금액	누계기성율	잔여금액
264,000천원	-	140,800천원	140,800천원	53.3%	123,200천원

Ⅳ		기성내역 검토

□ 기성금액 정산물량 검토

- 대    상 : 제1~3차 작업완료분

- 공사기간 : 2017. 4. 12. ~ 6. 10.

- 작업완료 규모

․ 논현로 등 차선 도색 L=54,710m, 표지병 설치 N=794개

□ 작업완료 건에 대하여 작업완료보고서, 건설사업관리원 검토 및 현장 확인결과 시방서 등 관련규정에 적합하게 시공되어 준공처리 하고자 함

Ⅴ		조치계획

□ 상기와 같이 건설사업관리기관인 도로교통공단에서 제출한 기성자료를 근거로 2017년 포장도로(긴급·굴착복구) 노면표시 도색공사 제1회 기성준공을 시행하고자 함.

붙임  1. 기성검사원 1부.

2. 기성검사 조서 1부.

3. 기성내역서 1부.  끝.