등록번호

도로시설과-15349

주무관

보도관리T/F팀장

도로시설과장

안전건설국장

부구청장

등록일자

2017.9.27.

황인태

박흥규

소철호

이우룡

09/28

황치영

결재일자

2017.9.28.

공개구분

대시민공개

협조

도로굴착팀장

황인수

예산팀장

박이만

기획예산과장

이재호

2018. 특별가로사업(지중화) 구예산 명시이월

안 전 건 설 국

도 로 시 설 과

2018. 특별가로사업(지중화) 구예산 명시이월

2018. 특별가로사업(지중화) 사업비를 공정율에 따른 효율적인 집행 등 원활한 사업추진을 위해 구예산 일부를 명시이월하여 사용코자 함.

Ⅰ		대상사업 개요

사업명	사업규모 (연장)	사업 시행 기간	사업비 정산기간	비고
계	1,090m	2016. 09 ~ 2018. 06	2017. 11 ~ 2018. 08
서애 대학문화거리 지중화	890m	2016. 09 ~ 2017. 10	2017. 11 ~ 2018. 03
삼일대로8길(중부서주변) 지중화	80m	2017. 10 ~ 2018. 06	2018. 07 ~ 2018. 08
동호로17길(버티고개역주변) 지중화	120m	2017. 10 ~ 2018. 06	2018. 07 ~ 2018. 08

※ 자치구·전기통신사업자간 사업비 1:1 매칭투자조건 임. 단, 도로복구비는 우리구 부담

Ⅱ		총괄 사업비 현황

단위 : 천원

사 업 명	계	시 비	구 비	사업자	비고
계	6,815,000	1,654,000	1,853,000	3,308,000
서애 대학문화거리 지중화	6,248,000	1,529,000	1,661,000	3,058,000
삼일대로8길(중부서주변) 지중화	178,000	37,500	65,500	75,000
동호로17길(버티고개역주변) 지중화	389,000	87,500	126,500	175,000

※ 삼일대로8길(중부서주변) 지중화 시비(37,500천원) 미확보 ☞ 확보 노력중

Ⅲ		사업비 집행 현황(민간사업비 제외)

단위 : 천원

사 업 명	계	시 비	구 비	2017.집행액 (연내 집행 예정포함)	2018.집행예정
계	3,469,500	1,616,500	1,853,000 (588,000)	3,048,484 (166,984)	421,016 (421,016)
서애 대학문화거리 지중화	3,190,000	1,529,000	1,661,000 (396,000)	2,943,084 (149,084)	246,916 (246,916)
삼일대로8길(중부서주변) 지중화	65,500	0	65,500 (65,500)	0 (0)	65,500 (65,500)
동호로17길(버티고개역주변) 지중화	214,000	87,500	126,500 (126,500)	105,400 (17,900)	108,600 (108,600)

※ 괄호안은 2018년 구예산 임. ☞ 588,000천원 중 166,984천원은 2017년 집행

Ⅳ		그간 추진 실적

❍ 서애 대학문화거리 지중화공사는 2016. 9월 착공하여 2017. 10월중으로 지중선로 개통 및 전주 철거를 완료할 예정임.

※ 9개 사업자가 참여한 사업으로, 사업비 정산은 4~5개월 소요될 것으로 판단됨.

❍ 삼일대로8길(중부서주변) 및 동호로17길(버티고개역주변) 지중화공사는 2017. 8월 지중화공사를 위한 협약을 체결하고 2017. 9월 현재 실시 설계를 진행중에 있으며 2017. 11월 공사착공할 예정임.

Ⅴ		명시이월 ☞ 2018. 구예산 : 421,016천원

단위 : 천원

세부사업명	예산과목	예산액	집행액	명시이월액	비 고
계		588,000	166,984	421,016
특별가로사업(지중화)	도로시설과, 도시기반시설확충, 도로유지관리, 특별가로사업(지중화), 자치단체등자본이전, 공기관등에대한자본적대행사업비	521,000	166,984	354,016
	도로시설과, 도시기반시설확충, 도로유지관리, 특별가로사업(지중화), 시설비및부대비, 시설비	67,000	0	67,000

❍ 공기관등에대한자본적대행사업비 명시이월액 ☞ 354,016,300원

▶ 부기명

· 서애 대학문화거리 지중화사업 : 246,916,000원×1식

· 삼일대로8길(중부서주변) 지중화사업 : 37,500,000원×1식

· 동호로17길(버티고개역주변) 지중화사업 : 69,600,300원×1식

❍ 시설비 명시이월액 ☞ 67,000,000원

▶ 부기명

· 삼일대로8길(중부서주변) 지중화사업 : 28,000,000원×1식

· 동호로17길(버티고개역주변) 지중화사업 : 39,000,000원×1식

Ⅵ		명시이월 사유

❍ 전기·통신선 지중화공사는 자치구의 주도적인 감독하에 한전·KT·LGU· 행정망 등 8~9개 사업자가 함께 시행하는 공사라서 제반비용부담이 가중되는 기간통신사업자들의 피동적인 사업추진 등의 사유로 사업지연 사례가 빈번함에 따라 자치구에서 적기 예산 집행에도 많은 어려움이 있음.

❍ 또한 공정율에 따라 예산을 구분(선금~중간금~정산금)하여 집행 하여야 편중지급으로 인한 예산부족 등 문제점이 발생하지 않으므로, 금년내에는 시비를 우선 사용하고 구비는 공정율을 감안하여 집행하되 일부 예산(421,016천원)을 명시이월하여 중간금~정산금 지급시 활용 코자 함.

※ 시설비는 도로복구비로 시기 미도래 임.

붙  임 : 명시이월요구서(특별가로사업 지중화) 1부.  끝.