문서번호	주차계획과-5262
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주차시설팀장	주차계획과장	교통정책관		도시교통본부장
최나영	최흥순	안석진	백호		04/21 김경호
협 조

광나루역 환승주차장 건립사업 추진 계획

2014. 4.

도시교통본부

(주차계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

광나루역 환승주차장 건립사업 추진 계획

2009년 11월 도시계획시설 사업 실시계획인가 고시되어 추진 중인 「광나루역 환승주차장 건설 사업」의 사업기간이 2014년 4월로 만료됨에 따라 관련 내용 및 향후 추진계획에 대한 검토 보고임

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 광진구 광장동 307-3호 외 12필지

○ 도시계획시설 : 체육시설+지하 주차장 (중복결정) 4,913㎡

⇒ 사유지 2,987㎡, 시유지 154㎡, 구유지 1,772㎡

○ 건축면적 : 3,400㎡ (연면적 6,800㎡)

○ 사업내용 : 주차장 200면 (지하 1∼2층)

○ 사업기간 : 2009. 04 ∼ 2014. 04

○ 총사업비 : 25,075백만원(시비)

⇒ 공사비 7,540/보상비 17,110/용역비 236/시설부대비 189

□ 추진 경위

○ 2007.10.30 : 서울시 대중교통 환승체계구축 종합계획(시장방침-579호)

※ 2007년 8월『서울시 대중교통 환승체계구축 및 복합환승센터 건립방안』용역 완료

○ 2009.10.22 : 도시계획시설(주차장) 결정고시 <광진구>

○ 2009.11.26 : 도시계획시설(주차장) 사업 실시계획작성 고시 <서울시>

○ 2010. 5.26 : 서울시 투자심사 (결정유보)

- 환승주차장 수요 분석과 사업부지에 대한 보상, 소유권에 대한 자치구와의 검토 필요

○ 2010. 9.15 : 서울시 투자심사 (재검토)

- 지상부 운동장(구 소유), 지하 환승주차장(시 소유) 조성시 사용권·소유권 관련 분쟁 야기 우려

- 보상비 분담에 대하여 구비 분담 불가 의견으로, 사업계획 전면 재검토

○ 2014. 4.   : 체육시설(지하 주차장) 부지내 사유지 보상 추진 <체육진흥과>

□ 검토 내용

○ 추진 현황

- 체육시설 부지내 사유지 보상 진행 중

: 2014.3.21 서토위 수용재결 (수용개시일 2014.5.9.)

- 지상 체육시설 조성에 대한 종합적인 계획을 검토 중 (체육진흥과)

- 체육시설과 도시계획시설로 중복결정된 주차장 사업의 실시계획 인가

고시된 사업기간이 2014.4월 종료 (체육시설:2015.10월 종료)

○ 검토의견

- 2009년 실시계획인가 후 5년이 경과되었는바, 여건 변화 등을 고려

하여 환승주차장 수요 분석 등 재검토 필요

- 당해 시설이 환승주차장임에도 환승시설이 미반영 되었으므로, 지하철

5호선 광나루역과 환승주차장간 연결통로 등 환승편의시설 확충 필요

※ 당해 부지 지하에 건립 예정인 광나루역 환승주차장은 체육시설 조성시

병행 추진

□ 향후 추진계획

○ 도시계획시설(주차장)사업 실시계획 변경 인가 고시

- 사업기간 : (당초) 2009.11~2014.4

(변경) 2009.11~2017.4.30.

○ 광나루역 환승주차장 수요분석 및 기본설계 용역 시행

- 2015년 예산 반영 추진

□ 행정사항

○ 체육시설 조성(체육진흥과)과 병행 시행을 위해 협조 체계 마련.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.