2017년 항공사진 DB구축 용역

월간업무보고서

- 9월 월간업무 현황보고 -
(2017. 09. 01 ~ 2017. 09. 30)

문 서 명	월간업무보고서
문서번호	PJ_AS_MWR_08	PM	감독관
작 성 자	박 성 원
보 고 일	2017년 10월 10일

사업 기간		2017.07.24 ~ 2017.12.31			실적기간		2017.09.01 ~ 2017.09.30
프로젝트명		2017년 항공사진 DB구축 용역			사업자명		㈜씨엠월드 PM 박 성 원
공정 진척 구분(%)		금 월			누 계				차 월
		계획	실적	대비율	계획	실적		대비율	계획
종 합	100.0	16.05	1.27	7.91	19.44	4.66		23.97	16.64
사업 관리	10	1.30	1.27	97.69	4.69	4.66		99.36	1.89
항공사진 DB 구축 및 변환	90	14.75	0	0	14.75	0		0	14.75

	2017년 항공사진 DB구축 용역 월간보고 (09월)		주관기관 담당자		최지혜 주무관
			사업수행 PM		박성원 차장
	문서번호:PJ_AS_MWR_09-09월간업무현황보고서_1010	버전: 1.0		작성일자: 2017/09/30

금 월 실 적 (2017/09/01 ~ 09/30)
사업관리	1. 사업관리 o 주간업무 보고 및 월간보고(9월) 작성 o 2017년 항공사진 취합 일정 체크
	2. 공간정보 페스티벌 전시회 발표자료 작성
항공사진 DB구축 및 환	1. 자료인수 준비

익 월 계 획 (2017/10/01 ~ 2017/10/31)
사업 관리	1. 정기보고 o 주간보고 및 작성 o 10월 월간보고 및 작성
	2. DB구축 진행 현황 체크
항공사진 DB구축 및 환	항공사진 DB변환 및 정비 - 자료 인수 - 자료 분석 및 확인 - 파일명 표준화 - 항공사진 성과내역 구축

기타사항
협의사항
기타사항

[ 목표 미완료/초과 완수 업무현황 및 처리계획 ]

업무현황	진행 현황 및 처리계획
내부업무시스템 통합
DB변환 및 정비

[ 주요의사결정 및 협조사항 ]

주요의사결정 및 협조사항

[ 이슈 및 위험요소 관리현황 ]

이슈 및 위험요소 관리현황	현황	처리/진행 결과	해결일자