문서번호	공원조성과-12302
결재일자	2017.10.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	주제공원팀장	공원조성과장		푸른도시국장
최재철	권종화	최현실		10/12 최윤종
협 조

동네뒷산 공원조성사업(관악산도시자연공원 독산지구)

대상지 변경 검토 보고

2017. 10.

푸른도시국

(공원조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

동네뒷산 공원조성사업(관악산도시자연공원 독산지구)

대상지 변경 검토 보고

동네뒷산(관악산도시자연공원 독산지구) 공원조성사업과 관련하여 토지보상 추진중 토지 소유관계 불분명으로 사업이 지연됨에 따라 원활한 사업추진을 위한 보상대상지 변경 요청이 있어 검토 결과를 보고 드림

※ 금천구 공원녹지과-14686호(2017.9.26.)

□ 2017년 사업개요

❍ 대 상 지 : ***********************

- 소 유 자 : *************************

******

․ *****************************************

․ ********************************************

❍ 사업내용 : 공원용지 보상 5,450㎡

❍ 사 업 비 : 2,100백만원

□ 그간 추진현황

❍ 2017. 1 ~ 2 : 토지주***** 연락처 조회(외교부 협조 등)

- 2017. 2. 23. : 보상협의 공문 발송(*** 캐나다 주소로 통보)

- 2017. 4. 28. : 우편물 반송

❍ 2017. 2. 22. : 여의도 헌정회 방문(*** 외 보좌관 등 면담)

- 국회의원 재직당시 토지를 소유하게 되어 ***에게 차명등기 주장

- 금년 사업에 대한 보상협의 및 ***와 연락 후 재협의 합의

❍ 2017. 3.16., 4.24. : *** 보좌관 금천구청 내방

❍ 2017. 4. ~ 5. : ***********과 이메일 연락

- 이메일을 통해 토지주의 연락처는 확보하였으나, 직접 연락은 안됨

□ 문 제 점

**************************************************************

*****************************************************************

□ 검토결과

********************************************************************************************

****************************************************************

□ 보상 대상지 변경(안)

❍ 금천구 요청현황

구 분	당초 대상지	변경 대상지
위 치	**********	***********
보상면적	****************	***************
공시지가	********	********
소 유 자	***	********
현 황	********** **********	************ **********

※ 감정평가 결과에 따라 보상면적이 변경될 수 있음

❍ 요청(안) 검토

******************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************

□ 향후계획

**********	**************

❍ 2017.10.	: 열람공고 및 실시계획 인가

❍ 2017.11.~12.	: 보상계획 공고 및 감정평가

❍ 2018. 1.~ 2.	: 보상협의 및 소유권 이전

붙임 : 1. 단계별 보상계획 및 도시관리계획 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.