문서번호	토목부-21136
결재일자	2017.10.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
정문수	여용석	김영수		전결 10/13 류훈
협 조

설계자문회의(3차) 개최 결과 보고

(신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계)

2017. 10.

도시기반시설본부

( 토  목  부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계자문회의(3차) 개최 결과 보고

(신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계)

우리부에서 시행 중인 「신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계」용역의 설계자문회의(3차) 개최 결과를 보고하는 내용임.

사업개요

◦ 위    치 : 관악구 신림동 140-2 일대

◦ 규    모 : 주차장 및 저류조 조성 10,232㎡

- 건축면적 : 1,553㎡(관리동, 기타 부속시설), 7,000㎡(지하1층 차고지)

- 주 차 장 : 버스 101대 (지상, 지하1층)

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥, 지하2층)

◦ 사업기간 : 2011. 1. ∼ 2019.12. (설계 : '16.12. 1. ～ '17.11.30.)

◦ 용역업체 : ㈜유신, ㈜도화엔지니어링, ㈜조우엔지니어링종합건축사사무소

◦ 총사업비 : 56,734백만원 (설계비 : 906백만원)

추진경위 (설계공정률 : 70.0%)

◦ '10.07.21. : 공영차고지 추가 조성계획

◦ '14.04.23. : 저류조와 주차장 공동 활용방안 검토

◦ '14.07.17. : 신림공영차고지조성 사업계획 변경

◦ '15.02.28. : 진입로 조성 설계 완료

◦ '15.11.06. : 투자심사(적정)

◦ '15.11.17. : 타당성 조사 시행

◦ '16.03.10. : 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시

◦ '16.09.29. : 도시계획시설(공원, 도로, 유수지, 자동차정류장)사업 실시계획인가고시

◦ '16.12.01. : 기본 및 실시설계 착수

◦ '17.04.06. : 기본설계 자문회의(1차)

◦ '17.07.28. : 기본설계 자문회의(2차)

설계자문 개요

◦ 안  건 : 신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계 자문

◦ 일  시 : 2017. 9.29.(금) 14:00 ~

◦ 주요 설계자문 내용

- 저류조 설치 위치 및 규모               - 저류조 유입부 형식

◦ 장  소 : 본부 11층 대회의실

◦ 위원장 : 류 훈 시설국장

◦ 위  원 : 8명

구 분	분 야	소 속	직 책	성 명	비고
외부위원	*****	******	****	***
	*****	*****	****	***	**
	*****	***	***	***
	*****	***	***	***
	*****	******** ********	***	***
	*****	*********	****	***
내부위원	****	*****	******	***
	****	****	****	***

주요 설계자문 의견

◦ 수자원분야

- 안양천권역 하천기본계획(2015, 서울지방국토관리청)에 제시된 관악산 지하방수로 유입부 규모를 고려하여 금회 지하저류조 유입부 위치 결정

- 지하저류조 유입부 형식은 수리적 안정성을 고려하여 장방형 개구부(위어) + 집수정 + 유입수로 형식으로 결정

- 횡월류 유입임을 고려하여 유입부 개구부(위어) 길이 결정시 유량계수는 작게 적용하고, 위어의 최소 길이는 15m 적용

- 유입부(위어, 집수정, 유입수로) 구조물 계획시 에어포켓, 와류현상, 낙하 수충격 등을 고려

- 지하저류조 운영방법과 관련하여 본 사업에서는 30년 빈도에서 신림3교 지점의 수위저감 효과를 최대화 시킬 수 있는 유입부 시작 수위를 제시하는 것이 바람직하며, 추후 운영단계에서의 지속적인 관측과 운영효율 분석을 통해 적정 운영계획을 재 수립하는 것이 타당함

- 지하저류조 배수는 5~6시간 이내 완전배수를 목표로 관련 펌프시설을 계획

◦ 계획 분야

- 저류조 유입부 부정류를 정류로 안전히 전환 후 유입하는 안정적 시설로 계획

- 저류조 유입방법은 서울대 입구 저류조 하부 또는 유입부에서 도림천을 따라 신림차고지 저류조로 유입될 수 있는 관로를 부설 검토

◦ 유지관리 분야

- 기 설치된 관악산 저류조와 연계한 운영계획 수립

- 도림천 훼손 최소화를 위해 기 설치된 임시집수정 개구부 활용 검토

주요 설계자문 결과

**************

********************************

*******************

********************************************************

****************************************************************

************

***********************

조치계획

◦ 설계자문 위원별 의견 사항에 대하여 설계용역 업체에 통보하여 검토 후 수자원분야 설계자문회의를 개최하고자 합니다.

향후 계획

◦′17.11. : 설계자문회의(수자원 분야) 개최

붙임 : 1. 위원별 자문 의견서 각 1부.

2. 설계자문회의 참석자 현황 1부.

3. 설계자문회의 설명 자료 1부.  끝.