문서번호	도로관리과-16719
결재일자	2017.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도로관리팀장	도로관리과장		안전총괄관
문미주	최연우	배광환		10/16 이진용
협 조

남부도로사업소 신축 공사 추진계획

2017. 10.

도 로 관 리 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

남부도로사업소 신축 공사 추진계획

남부도로사업소 이전(청사,공원,제설전진기지) 설계용역 및 계약심사 등 사전절차를 완료하고, 공사 추진을 위한 총사업비 추가 확보 계획임.

□ 사업개요

○ 위    치 : 금천구 시흥3동 961-5 외 12필지, 강남순환 선암교 하부

○ 내    용 : 청사 신축, 소공원, 제설전진기지 조성

○ 규    모┌ 청사·공원 : 부지면적 4,601㎡, 연면적 5,360㎡ (지하1,지상5)

┗ 제설기지 : 부지면적 6,459㎡, 전진기지 및 직원대기실 등 1식

○ 총사업비 : 39,900백만원 (보상비 18,941, 공사비 18,037, 설계비 등 2,922)

□ 추진현황

○ `16.12월 : 소공원 기본 및 실시설계 용역 준공

○ `17. 6월 : 제설전진기지 기본 및 실시설계 용역 준공

○ `17. 7월 : 공공청사 기본 및 실시설계 용역 준공

○ `17. 7월 ~ 9월 : 공사 계약심사 이행(청사, 공원, 제설전진기지)

설계용역 개요

구 분		용 역 개 요	기 간	용 역 비	사업부서
계				1,005,392천원
1	공공청사	위치 : 시흥동 961-5외 8필지 규모 : 부지 면적 2,438㎡, 건축 연면적 5,360㎡	2015.4.17. ~2017.7.31	679,800천원	도시기반시설본부 건 축 부
2	제설기지	위치 : 우면동 446-5일대 규모 : 부지 면적 6,459㎡	2014.12.29. ~2017.6.30.	291,440천원	도시기반시설본부 방재시설부
3	소 공 원	위치 : 시흥동 963-1외 3필지 규모 : 부지 면적 2,163㎡,	2015.10.6. ~2016.12.9.	34,152천원	서부공원녹지사업소 시 설 과

□ 총사업비 추가 확보

○ 사업비 변경

(단위:백만원)

구 분		당 초	변 경	증 감	증 감 사 유
총 계		39,900	41,705	1,805	보상비, 공사비 등 변동사항 반영
보 상 비		18,941	19,164	223	중토위 재결확정에 따른 보상비 증액 반영
공사비	소 계	18,037	19,920	1,883	설계완료, 계약심사 등에 따른 증감 반영 ※ 붙임. 공사비 세부 산출내역
	청 사	14,135	15,390	1,255	사용자 요구, 심의·인허가, 물가변동 조정 반영
	공 원	800	829	29	석면처리, 철거 및 폐기물 처리비 증액
	제설전진기지	3,102	3,701	599	장비 세차장, 전기설비 등 시설비 증액
용역비등	소 계	2,922	2,621	△301	공사 건설사업관리 용역비 감소 등 반영
	감리비	1,798	1,461	△337	청사건축공사 건설사업관리 용역비 감소
	설계비	1,094	1,130	36	장비보관소 설계, 석면조사용역비 등 증가
	시설부대비	30	30	-	-

○ 연차별 계획

(단위:백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019	비고
계	41,705	15,911	15,339	8,000	2,455
설계비	1,130	951	179	-	-
보상비	19,164	14,960	4,204	-	-
공사비	19,920	-	9,816	7,800	2,304
감리비	1,461	-	1,120	190	151
시설부대비	30	-	20	10	-

□ 향후계획

○ 2017. 11. : 청사, 공원 공사 착공   ※ 제설전진기지 공사 진행 중 (착공 9월)

○ 2018.  3. : 제설전진기지 공사 준공

○ 2019.  3. : 청사, 공원 공사 준공

붙임  공사비 세부내역 1부.  끝.