문서번호	물재생계획과-13189
결재일자	2017.10.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	배수설계팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
이승주	심형보	하상문		10/11 권기욱
협 조

「2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역(중랑·난지/탄천·서남)」

준공기한 연기 검토 보고

2017. 10.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역」

준공기한 연기 검토 보고

「2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역」과 관련하여 추가 설계 시행 및 건설기술심의 절차 이행 등 설계도서 보완에 필요한 과업(준공)기한을 연기하여 용역 수행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역개요

용 역 명	2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역 (중랑, 난지처리구역)	2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역 (탄천, 서남처리구역)
용 역 사	㈜동명기술공단종합건축사사무소 대표 신완수 ㈜한국종합기술 대표 이강록 ㈜동해종합기술공사 대표 정점래	㈜이산 대표 이원찬 ㈜도화엔지니어링 대표 박승우 ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 대표 최태희
용 역 비	금890,200,000원	금879,100,000원
용역기간	2016. 8. 9. ~ 2017. 10. 12.	2016. 8. 9. ~ 2017. 10. 12.
과업내용	- 노후관로 상태조사 : 142㎞ (CCTV 140㎞, 육안조사 2㎞) - 기본 및 실시설계 : 6㎞	- 노후관로 상태조사 : 142㎞ (CCTV 140㎞, 육안조사 2㎞) - 기본 및 실시설계 : 6㎞

Ⅱ		추진경위

❍ ‘16. 8. 9.      : 용역착수

❍ ‘16. 9. 9.      : 착수보고회 개최

❍ ‘16. 9.~‘17. 1. : 관로 내부조사(CCTV 및 육안)

❍ ‘17. 2.~3.     : 설계 경제성(VE) 심사

❍ ‘17. 4.         : 설계VE 및 1차용역 계약심사 설계도서 보완

❍ ‘17. 5.~7.     : 부분보수 대안공법(몰탈보강) 검토(물재생계획과-8914)

❍ ‘17. 8.~9.     : 실시설계(환경부기준) 및 자치구 협의도서 배포

Ⅲ		변경내용

❍ 과업내용 : 변경 없음

❍ 과업기간

구 분	당 초	변 경	비고
계약기간	‘16.8.9. ~ ‘17.10.12.	‘16.8.9. ~ ‘17.12.21.	70일 연장

❍ 귀책사유 : 서울특별시

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		변경사유

❍ 노후 하수관로 정비 중복구간 추가 설계 시행 및 자치구 협의 지연에 따른 건설기술심의 절차 이행을 위한 절대공기 부족

- 서울시 기준 부분보수 구간 정비 후 환경부 기준으로 재판독시 긴급보수(전체보수)에 해당되는 구간 추가 실시설계 시행(‘17.8.~9.)

- 건설기술심의 전 자치구 설계도서 배포 및 협의(‘17.9.)

Ⅴ		향후계획

❍ ‘17. 10. : 자치구 의견 검토 및 건설기술심의 개최

❍ ‘17. 11. : 심의결과 조치 및 최종보고

❍ ‘17. 12. : 용역 준공

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 용역 준공기한 연기 요청 공문 각 1부.  끝.