아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰

1. 우리부서에서 시행 중인‘서울 어울림체육센터 건립을 위한 도시계획시설(체육시설·주차장) 중복결정 용역’에 대해 다음과 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울 어울림체육센터 건립을 위한 도시계획시설(체육시설·

운동장) 중복 결정

나. 계 약 자 : ㈜아시아인서울건축사사무소(대표자 권영근)

다. 계약금액 : 금44,383,090원

라. 계약기간 : 2016.12.19.∼ 2017.10.15.

마. 준공기한 연기 : 2017.10.15. ⇒ 2018.03.14.(증 150일)

마. 연기사유 : 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경)(안)에 대한 관련                                  부서 협의의견 반영

붙임 : 1) 준공기한연기의뢰서 1 부.

2) 방침서 1부.

3) 연기합의각서 1부

4) 계약보증금지급각서 1부.   끝.

	체육정책과장
주무관	정성윤		체육시설팀장	이승헌		체육정책과장	10/17 최한철
협조자
시행	체육정책과-12447	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-2693	/전송	02-2133-1064	/	cupsyj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)