아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	봉제역사관 공사내용 일부변경 요청

1. 문화융합경제과-7779(2017.10.25.)호 및 도기본 건축부-16853(2017.9.26.)호와 관련입니다.

2. 봉제역사관에 설치계획인 외부계단 투명 유리난간에 대해 프라이버시 침해를 우려하는 민원 대응과 공간의 효율적 활용방안 마련을 위해 개최한 전문가 자문회의(’17.10.19)와 관련하여 아래와 같이 협의 조정 내용을 송부하니, 공사에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 요청 내용  ※ 붙임 검토보고서 참조

1) 외부계단 유리난간 계획 : 불투명 강화유리 난간, 높이 1.6M 상향 조정

2) 외관 단순화 위해 외부 전면부에 설치된 메탈페브릭 제거 및 재활용 방안 마련

3) 공간활용 및 접근 안전을 위해 지하 통로 출입문 1m 후퇴

4) 봉제역사관 남측면 1층 대지와 접해있는 647-7번지 대지간 1M 단차에 대해 바닥높이를 높이고, 그 공간에 조경 식재(대안 3)

5) 1층 야외 바닥패턴 정리 : 산만한 느낌의 트리톤 패턴을 심플하게 투톤으로 정리

6) 운영사무국 위치 변경 : 2층 → 지하 1층

3. 또한, 공사 설계서에 누락되어 있는 봉제역사관 천장, 벽체 등의 마감재 및 색상을 붙임과 같이 송부하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 검토보고서 1부

2. 마감재 및 색상 결정사항 1부.

3. 변경안(회의자료, 별도첨부) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김성미		문화융합경제과장	10/25 김경탁
협조자	문화산업정책팀장	박주선
시행	문화융합경제과-7785	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 (무교동) 더익스체인지서울빌딩 3층	/
전화	02)2133-2587	/전송	02)2133-1061	/		/	부분공개(6)