문서번호	물재생시설과-15564
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

- 마곡구역 도시개발사업(SH공사) -

154kV 수전선로 이설공사 완료보고

2017. 10.

물순환안전국

(물재생시설과)

- 마곡구역 도시개발사업(SH공사) -

154kV 수전선로 이설공사 완료보고

SH공사 마곡구역 도시개발사업과 관련하여 지하 우수암거 횡단설치공사 지장물인 서남물재생센터 154KV 수전선로 이설공사 완료에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

❍ ‘17.03.28 : 인입전력케이블 이설관련 예비전원확보 검토 요청

(서남운영1-2017-157)

❍ ‘17.03.30. : 서남센터 154kV 수전선로 이설 검토 보고

(물재생시설과-4855)

□ 공사현황

❍ 건    명 : 154kV 수전선로 이설공사(마곡구역 도시개발사업)

❍ 시 행 사 : 서울특별시 SH공사

❍ 공사기간 : `17. 07. 14. ~ `17. 08. 30.

❍ 위    치 : 강서구 마곡동 양천길(서남물재생센터 수전선로)

❍ 사    유 : 양천길 지하 우수암거 횡단설치공사 지장물

❍ 공사내용 : 지장 특고압 케이블을 우회 공동구로 이설

<공사전> 양천길 지중매설(한전,서남센터)	<공사후> 공동구 우회설치(한전,서남센터)

□ 154kV 수전선로 이설공사 준공에 따른 시설물 인수

❍ 시설물 인수전 사전점검

- 점검기관 : 한국전기안전공사, 물재생시설과, 서남물재생센터

- 점검일자 : 2017. 07. 31.

- 점검결과 : 시공상태, 절연저항 등 이상없음

❍ 인수시설물

- 지장 이설 케이블 및 부대설비 1식(한전 공동구 내 시설)

· 154kV 수전 케이블 : XLPE 400mm 178m × 4C

▸한전 공동구 사용료 인수전 선납 조건(납부기간 : 영구)

- 이설공사를 위해 시설한 임시전력 공급설비 1식

· 인수목적 : 서남물재생센터 비상용 임시전력 설비로 활용

[인수조건 : 기부채납(SH공사 → 서울시)]

· 주요 임시전력 공급설비

▸ 22.9kV/6.6kV 3,000kVA 변압기 1대, 수배전반 8면 설치

▸ 22.9kV 케이블 : ACSR 58mm 310m × 4C

□ 154kV 수전선로 이설에 따른 전력비 손실금액 정산

❍ 정산기간 : `17. 06. ~ `17. 08.(3개월)

❍ 정산금액 : 888,510원(SH공사 → 서울시)

구 분	금액(원)	정산기관
① 임시전력 사용에 따른 전력비 이득금액	66,962,660	서울시→SH공사
② 소화가스발전기 미가동에 따른 전력비 손실금액	67,851,170	SH공사→서울시
③ 최종 정산금액(②→①)	888,510	SH공사→서울시

※ 세부 정산내역 : 첨부 전력요금 정산 세부내역 참조

□ 행정사항

❍ 154kV 수전선로 이설 완료에 따른 관련 전력시설 인수 및 전력비 손실금액 정산

- 전력시설 인수 : 인수·인계서 작성 후 기관별 보관

- 전력비 손실금액 정산

▸ 정산금액 : 888,510원(SH공사→서울시)

▸ 정산방법 : 세입처리(잡수입으로 여입)

□ 향후계획

❍ 검토내용을 서남센터에 통보하여 관련기관 협의토록 조치.

첨부 : 1. 이설협의 관련 공문 각 1부.

2. 인수·인계 관련서류 각 1부.

3. 전력요금 정산 세부내역 각 1부.  끝.