문서번호	녹지관리과-9256
결재일자	2017.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	녹지관리팀장	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김완수	임광빈	김윤철	10/30 代김용중
협 조

2018년 예방사방사업 추진계획

2017. 10.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2018년 예방사방사업 추진계획

’18년 예방사방사업을 우기 전(’18.6월)에 완료하여 집중호우 시 산사태 피해 등을 사전에 예방하고자 함

Ⅰ. 추진근거

❍ 산지방재과-11263호(2017.10.10), 2018년 산사태 예방사업 추진계획

Ⅱ. 사업개요

❍ 대    상 : 용산구 한남동 산9-2(다산정 팔각정 아래) 등 7개소개소      (단위: 천원)

연번	소 재 지	사업종	사업비	비고
1	용산구 한남동 산9-2(팔각정아래)	위험절개지	66,000
2	중구 예장동 2-1(문학의집 주변)	위험절개지	39,000
3	중구 예장동 산5-6(숭의여대 주변)	위험절개지	41,000
4	중구 예장동 산5-6(숭의여대운동장 강의 A동 뒤	위험절개지	24,000
5	중구 예장동 산5-6(숭의여대 뒤)	위험절개지	53,000
6	중구 예장동 산5-6(숭의초등학교 뒤 공사지역)	위험절개지	68,000
7	중구 예장동 산5-6(와룡묘)	위험절개지	63,000

❍ 사업기간 : ’17. 10. ~ ’18. 6.

❍ 사 업 비 : 375,743천원(공사비 354,000천원, 설계비 21,743천원)

Ⅲ. 시행방법

❍ 공사시행 : 도급시행(일반경쟁입찰)

❍ 실시설계 : 수의계약

- 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25               제1항 제5호

- 사    유 : 금액이 소액이며 사업의 정상추진을 위하여는 설계기간 단축을               위하여 경험이 많고, 신뢰성 었는 산사태예방 전문설계업체와 수의계약

❍ 예산과목 : 푸른도시국 산지방재과, 산림안전관리, 산림재해방지, 사방사업, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ. 추진경과 및 계획

❍ ’17. 10.         : 실시설계 기술용역타당성 심사

❍ ’17. 10.         : 실시설계용역 발주 및 업체 선정

❍ ’17. 11. ~ 12. : 설계용역 시행(설계심의 등)

❍ ’18. 01. ~ 02. : 입찰, 공사계약

❍ ’18. 03. ~ 06. : 공사 시행 및 공사준공

Ⅳ. 보고자의견

❍ 예방사방사업을 우기전(’18. 6월) 완료하기 위하여 설계용역은 금년도 예산집행잔액을 산지방재과로부터 재배정받아 ‘17년 12월말까지 완료

붙임 2018년 산사태 예방사업 추진계획(서울시) 1부. 끝.