윤재옥 국회의원 요구자료(월드컵대교 건설)

□ 월드컵대교 건설 최초 사업 내용 대비 2017년 기준 사업 내용

1. 2010년 서울시 투자심사에 따른 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'09년	'10년	'11년	'12년 이후
계	355,049	8,420	800	7,500	56,500	280,829
설계비	9,020	8,420	600	-	-	-
토지매입비	3,100	-	-	-	3,100	-
시설비	333,766	-	-	7,000	51,900	274,866
감리비	8,163	-	200	500	1,500	5,963

※ 시설비는 공사발주 전 설계가격 기준

2. 월드컵대교 공사 예산 투입 현황

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
예산액	258,858	9,220	7,500	10,000	15,000	10,000	10,000	15,000	27,000	35,000	52,000	40,000	28,138

3. 투자심사 대비 총사업비 변경 주요 사유 : 공사계약에 따른 낙찰률 적용(68%) 등

4. 공사기간 변경 현황

구 분	당 초	변 경
공사기간	2010. 3. ~ 2015. 8.	2010. 3. ~ 2020. 8.

□ 월드컵대교 공사 관련 지연 사유 등

1. 월드컵대교 공사 지연 사유

- 서부간선 지하도로와 2015년 동시개통을 목표로 사업을 추진하였으나, 같은 노선 축선상에 있는 서부간선지하도로 민간투자사업이 행정절차 이행으로 2016년 3월 착공하여 2021년 완료될 예정임에 따라 이에 맞춰 월드컵대교 사업기간을 2020년으로 조정하였음.

2. 사업기간 지연에 따른 손해배상 청구 등 서울시와 법적 분쟁사안 등

- 해당 없음.

□ 2014. ~ 2017. 8. 까지 월드컵대교 건설과 관련한 민원 접수 및 조치 현황

- 해당 없음.

□ 현재 운용중인 교각(철교 포함)별 최초 건설 계획 대비 실제 건설 비교표

구 분	최초 계획	실제 공사기간	비고
구리암사대교	2006. 4. ~ 2011. 3.	2006. 4. ~ 2016. 12.
원효대교	1978. 7. ~ 1980. 12.	1978. 7. ~ 1981.10.
서강대교	1980. 6. ~ 1984. 12.	1980. 6. ~ 1984. 1992. 12. ~ 1999.8	'84년 공사중단 이후 '90년 재추진
가양대교	1994. 3. ~ 1997. 12.	1994. 12. ~ 2002. 5.

□ 서울로 7017 예산 편성 현황

(단위 : 백만원)

구 분	소계	'15년	'16년	'17년
예 산	59,700	10,500	22,000	27,200