국회의원 요구자료 제출

시 행	교통정책과-8148	(		)
접 수		(		)
결재일자	2017.10.10.
공개여부	대시민공개
수 신 자	기획담당관

주무관	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장		결재
장연수	구종원	이대현	10/10 고홍석
협 조
	도시철도관리팀장			윤석환

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호1230번, 황영철 의원, 행정안전위원회)

붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

황영철 의원(행정안전위원회, 바른정당)

[요구번호 : 1230번]

* 스크린도어 안전 문제관련

1. 구의역 사고이후 스크린도어 전면 조사 결과

2. 조사결과 관련 개선 추진 진행상황(개선사항별 추진 경과)

구의역 사고이후 스크린도어 전수조사 및 개선사항 진행상황을 아래와 같이 제출합니다.

1. 구의역 사고이후 스크린도어 전수조사 결과

○ 일 시 : ’16. 6. 20 ~ 7.22(33일간)

○ 방 법 : 307개 전체 역사에 대해 시, 공사, 외부전문가 합동점검

○ 결 과 : 정비대상 101개소

구 분	양호	정비대상(역)
		계	부분정비	센서정비	제어시스템, 구조물 정비	전면교체
계	206	101	51	22	27	1
서울메트로	51	70	39	8	23
도시철도	126	31	12	14	4	1
9호선	29	-	-	-	-	-

2. 조사결과 관련 개선 추진 진행상황

□ 전면교체 (김포공항 등 9개역)

○ 우장산역

- SIL인증 시범역으로 별도 시행중인 우장산역은 시공업체 계약완료(’17.7.17)하여, ’18.11월 완료 목표로 차질 없이 추진되고 있음

○ 김포공항역 등 8개역

- 김포공항역 등 8개역은 국제안전기준(RAMS, SIL)을 고려한 사업기간 부족 및 전문인력 부족 등으로 3차례의 유찰, 사업 추진이 지연되었으나

- 현재, SIL 인증을 포함하여 승강장안전문 안전성을 더 강화하고, 사업기간 등을 조정하여 재 추진중에 있음

- 향후 일정

계약체결	구조체 진단, 설계검증, 시험검사	운영교육, 시운전, 준공
’17. 10월	’17. 10월 ~ ’19. 1월	’19. 2월 ~ 3월

□ 부분정비

○ 부분정비(일상부품 교체 및 LED모니터 개선 등)

- 안전삼각대 롤러 조정 5역(’16.11월 완료)

- 비상문 및 선로출입문 부품 제작 설치 7역(’17.4월 완료)

- 승강장안전문 구동부 정비(오버홀) 완료 93역(’17.7월 완료)

- HMI 고휘도 LED 모니터 개선 41역(’17.10월 완료예정)

□ 제어시스템 및 구조물 정비

○ 제어시스템 정비

- PSD HMI 고휘도 LED 모니터 개선 35역(142개소) ’17.9월 완료

○ 구조물 정비

- 가동도어 구조물 개선 10역 (’17.10월 완료 예정)

□ 장애물검지센서 교체 (포토․에어리어센서 → 레이저스캐너센서)

○ 기존 센서 대비 성능이 우수하고 작업자 안전확보에 유리한 센서로 교체

○ 추진경과 : 278개 역사 중 111개 역사 설치완료 (’17.9월 기준)

- 구의역 사고 이전 : 13개역 1,530개 설치

- 구의역 사고 이후

□당산역 등 10개역(760개) 설치 완료(’17.4월 완료)

□종각역 등 125개역(9,126개) 설치중(’17.11월 완료 예정)

※ ’17.9월 88역(7,108개) 설치 완료

□장암역 등 4개역(224개) 국산화개발 설치 추진중(’17.12월 완료 예정)

○ 향후계획 : 잔여 126개 역사 ’18년 교체예정(전면재시공 역사 포함)

- 강동역 등 119개역(7,538개) ’18.12월 완료 예정

※ 전면재시공 7개역 456개(기설치 2개역 제외)는 재시공 일정에 따라 시행

※ 9호선 24개역(1,368개)은 ’18년도 설치 예정(별도시행)

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	윤석환
	☎2133-2249	담당자	장연수
	작 성 일 : 2017. 9. .