월드컵대교 건설

□ 사업개요

◦  위    치 : 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동

◦  규    모 : 교량건설 폭 6차로(31.4m), L=1,980m

- 주경간교 : 855m(비대칭 복합 사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접 속 교 : 1,125m(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

◦  공사기간 : 2010. 3. ~ 2020. 8.

◦  총사업비 : 258,858백만원

□ 추진현황

◦ '01. 04. ~ '06. 12. : 기본 및 실시설계 시행

◦ '10. 03. 22.	: 공사계약 및 착수

◦ '14. 12.            : 수중구간 교각 15기 시공 완료

◦ '17. 10. 현재        : 수상 주탑, 북단 접속교 및 연결로 시공 중(공정률 43%)

□ 예산투자 계획

◦ 예산집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	총투자비	기투자	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년
예 산	138,720	9,220	7,500	10,000	15,000	10,000	10,000	15,000	27,000	35,000

◦ 향후투자계획(안)

(단위 : 백만원)

구 분	추가소요예산	'18년	'19년	'20년
예 산	120,138	52,000	40,000	28,138

◦ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'18년	'18년	'20년	비고
예 산	258,858	138,720	52,000	40,000	28,138	전액 시비

□ 향후계획

◦ '17. 12. : 수상구간 주탑 시공 완료

◦ '18. 12. : 교량 상부공(강교가설) 완료, 사장교 주탑 시공 완료

◦ '19. 12. : 남단 연결로 및 접속교 시공 완료

◦ '20. 8.  : 개통 및 준공

□ 착공 후 연도별 연도말 기준 완공율

구분	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
완공율	3.2%	7.4%	12.6%	16.4%	20.0%	26.3%	35.7%	46.8%	66.9%	86.8%	100%

□ 위치도