투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(강남역 주변 역경사 관로 개선-승강기 구매)

우리 부에서 시행중인『강남역 주변 역경사 관로 개선공사』에 소요되는 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강남역 주변 역경사 관로 개선공사-승강기 구매

나. 납품기한 연기요청 내용

납품요구번호	품 명	계약금액(원)	계약업체	납품요구일	납품기한
					당 초	변 경
12-17-2-04765	승강기	53,300,000	**********	2017.02.09	2017.10.31	2018.2.28

※ 계약금액 변경 없음

다. 연기사유 : 설치시기 미도래(도시기반시설본부 귀책)

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 관련문서 및 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	추한영		열빛총괄과장	유병기		설비부장	10/31 권오식
협조자
시행	설비부-18198	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8610	/전송	02-3708-8659	/	cc2436@seoul.go.kr	/	부분공개(5)