문서번호	물재생계획과-14192
결재일자	2017.11.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	배수설계팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
곽인복	代양태수	하상문		11/01 권기욱
협 조

사당역 일대 배수개선 단기대책(관로부분) 기본 및 실시 설계 용역

준공기한 연기 보고

2017. 10.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

사당역 일대 배수개선 단기대책(관로부분) 기본 및 실시설계 용역

준공기한 연기 보고

관련계획과의 연계성을 고려한 시설계획을 수립하고자 과업기간을 연장하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함 (당초’17.11.1. ⇒ 변경 ‘18.1.29.)

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 사당역 일대 배수개선 단기대책(관로부분) 기본 및 실시설계 용역

□ 용역기간 : 2016. 7. 13. ~ 2017. 11. 1.

□ 용역업체 : 경동엔지니어링 외 1개사

□ 용 역 비 : 658,676천원

□ 과업내용

○ 사당역 일대 침수원인 분석 및 침수방지 대책 수립

- 기본계획(사당역 일대 배수개선대책 기본설계)에서 제시된 단기대책의 적정성을 검토하여 보완 후 최적 배수개선대책 수립

○ 기본 및 실시설계

- 단기대책(저류조 및 하수관로 개선 등) 중 하수관로 개선에 대한 시설계획 및 유지관리계획 수립

Ⅱ		추진경위

□ ‘16. 3. 23. : 사업시행 요청(하천관리과)

□ ‘16. 4. 26. : 용역시행방침 수립

□ ‘16. 7. 13. : 용역착수

□ ‘16. 8. 16. : 착수보고회 개최

□ ‘16. 11.~12. : 관련부서(자치구 치수과) 사업설명 및 의견조회

□ ‘17. 1. 17. : 1차 중간보고 및 자문회의 개최

□ ‘17. 6. 20. : 추진현황 및 변경계획 보고

○ 이수역, 사당역 일대의 시설계획부터 우선 수립하는 것으로 계획 변경

Ⅲ		변경내용

□ 과업내용 : 변경없음

□ 과업기간

구 분	당 초	변 경 후
계약기간	2016. 7. 12. ~ 2017. 11. 1.	2016. 7. 12. ~ 2018. 1. 29.(89일 연장)

□ 귀책사유 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 변경사유

******************************************************************************

Ⅳ		향 후 계 획

□ ‘17. 11. 01. : 용역기한 연기 변경계약

□ ‘18. 01. 29. : 용역 준공

붙임 : 용역 과업기간 연장요청 공문 1부. 끝.