등록번호

토목과-15323

주무관

보도관리팀장

토목과장

안전건설교통국장

등록일자

2017.11.1.

이여진

박광희

김영철

11/02

이경우

결재일자

2017.11.2.

공개구분

대시민공개

협  조

준공기한 연기 검토보고

[ 도로측구 정비공사 ]

서 대 문 구

토목과

준공기한 연기 검토보고

[ 도로측구 정비공사 ]

우리구에서 시행중인『도로측구 정비공사』시행 중 준공기한을 아래와 같이 연기코자 함. (관련근거 ㈜ 범주건설 171026(2017.10.26.))

Ⅰ	사 업 개 요

○ 공   사   명 : 도로측구 정비공사

○ 위        치 : 연희로 113~119 외 6개소

○ 사 업 개 요

- 측구정비(B=50cm) : L=256m

○ 사   업   비 : 44,700천원

(도급비 : 31,423천원, 관급비 13,282천원)

○ 도   급   자 : (주)범주건설  대표 박봉자

○ 사 업 기 간 : 2017. 9 . 21 ~ 11. 09

Ⅱ	보 고 내 용

○ 당초 본 공사는 2017. 9. 21일 착공되어 2017. 11. 9일 준공예정으로 측구정비공사를 시행하고 있으나 관급자재 중 보차도경계석의 자재 물량부족으로 공급이 2017.10.25까지 지연되어 공사진행에 차질이 발생함에 따라 절대공기가 부족한 실정임.

Ⅲ	조 치 계 획

○ 위와 같은 실정을 감안하여 본 사업의 당초 준공기한을 아래와 같이 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

가. 준공기한 연기

· 당초 : 2017. 9. 21. ~ 2017. 11. 9.

· 변경 : 2017. 9. 21. ~ 2017. 11. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : 서대문구청

다. 지체상금 부과여부 : 해당없음

라. 연기사유 : 관급자재 중 보차도경계석의 자재 물량부족으로 공급이 2017.10.25까지 지연되어 공사진행에 차질이 발생함에 따라 절대공기 부족으로 준공기한 연기 필요.  끝.