문서번호	안전치수과-18266		주무관			치수팀장			안전치수과장	안전건설교통국장
결재일자	2017.11.2.
			박성웅			김정선			황왕연	11/02 이학구
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호

철도횡단 하수박스 정밀점검 용역

설계변경 검토 보고

2017. 11.

안전건설교통국

[안전치수과]

철도횡단 하수박스 정밀점검 용역

설계변경 검토 보고

철도횡단 하수박스 정밀점검 용역 시행중 추가과업 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 검토 보고함

Ⅰ		사업개요

용 역 명 : 철도횡단 하수박스 정밀점검 용역

과업기간 : 2017. 4. 18. ~ 2017. 11. 30.

도 급 자 : 호용종합건설(주) 대표 김익관

도 급 비 : 14,553천원

Ⅱ		주요 추진현황

2017.  4. 18 : 용역착수

2017.  6. 12 : 전문가 현장점검

2017.  7. 12 : 용역 보고회

2017. 10. 24 : 마제형 하수박스 준설작업 완료

Ⅲ		설계변경 검토내용

용역보고회 전문가 자문의견에 따른 추가 과업 수행을 위한 설계변경

(자문의견 : 구조물 단면해석, GPR 탐사, 바닥면 조사)

⇒ 구조물 단면해석은 비용과다로 향후 실시설계용역에 포함하여 수행(약 50백만원)

⇒ GPR탐사 및 바닥면 조사는 준설작업이 완료되어 시설물 정밀안전진단 및 점검용역

잔여예산 활용하여 시행(약 4백만원)

전문가 자문횟수 증가에 따른 자문비 증가(당초 5인 → 변경 8인)

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감
총용역비		14,553,000	19,250,000	4,697,000
도급액	공급가액	13,230,000	17,500,000	4,270,000
	부가가치세	1,323,000	1,750,000	427,000
	계	14,553,000	19,250,000	4,697,000

Ⅳ		조치계획

상기와 같이 설계변경을 시행하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 용역보고회 결과 보고 1부.  끝.