				부장			팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장
문서번호		주차시설운영처-13248
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2017.10.17.
공개여부		공개
『 공영주차장 맞춤형 디자인 적용 』 디자인 표준안 시공계획
			2017. 10.
						주차시설운영처

『 공영주차장 맞춤형 디자인 적용 』

디자인 표준안 시공계획

「공영주차장 맞춤형 디자인 가이드라인(디자인재단 협업사업)」이 완료됨에 따라

이를 적용․개선(내부도색, 방향표지판, 요금안내간판 등)하여 공영주차장의

정체성, 시인성, 안전성을 제고코자 함임.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 2017년 주요사업 핵심과제 (주차시설운영처-647)

- 공영주차장『맞춤형 디자인 표준설계』적용

○ 공영주차장『디자인 표준 설계기준 마련』추진계획 (주차시설운영처-4248)

- 市 공영주차장 디자인 표준화 설계기준 마련 사업추진 계획(안)

○ `17.7.3 전략데스크 회의 사업 추진사항 보고

-『이용시민 안전성 및 편의성 향상을 위한』 공영주차장 디자인 표준안 설계 추진사항

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사업내용

○ 공영주차장 디자인가이드라인 개발 및 적용

- 유형별(노외, 노상 등) 공영주차장 디자인 표준화(색상, 글자체 등) 및 기준확립

- 이용자 관점의 서비스디자인 제공 : 사인물 시인성 개선 및 안전디자인 적용

- 이용시민 누구나 市 공영주차장임을 인지할 수 있는 이미지 및 상징성 부여

○ 서울시설공단 - 서울디자인재단 협업사업으로 추진

- 서울디자인재단 : 디자인 용역 및 가이드라인 제작, 효과성 검증 등 (1단계)

- 서울시설공단 : 디자인 적용 실행(시공) 및 설치, 디자인 확산 등 (2단계)

□ 진행현황

일 정	디 자 인 재 단	시 설 공 단
2017 1~2월	‣서울 디자인재단 합동 현장조사(3회) ⟶ 8개소 조사	‣사업개시 실무회의 준비(2회) ‣사업개시 실무회의(2.8)
3월	‣실무 정기회의(2회) ⟶ 시설주차장(세종로), 노외주차장(마포), 노상주차장(청계천·을지로) 대상지 선정	‣주요사업 추진에 적합한 장소 (시범 설치 대상 3개소)선정 관련 현장 실무자와 협의 및 조사
4월	‣디자인 용역업체 사업제안 및 업체선정 보고회(2개 업체)
5~6월	‣용역업체(더디엔에이) 계약체결 후 과업착수 ‣사업 착수 보고회(6.8) ‣이해관계자 워크숍(6.23)	‣사업 추진 방향 및 개선 범위 확정 ‣실무 정기 회의(1회) ⟶ 이해관계자(시민, 관련직원) 워크숍 및 자문위원단(6명) 추천회의
7~9월	‣디자인 및 실시설계 진행 ‣사업시행 중간보고(8.16) ‣市 공공디자인 심의(8.28~9.5)	디자인 가이드라인 제작 실시설계 피드백
10월	‣디자인 실시설계 완료(10.11) ‣디자인 적용 발주자료(시안 등) 제공	‣도면제작 용역발주 ‣디자인 적용 발주준비(서울시 계약심사 등)
11~12월	‣디자인 용역 준공 ‣디자인 적용 효과성 검증 ‣용역사업 최종 보고회	‣디자인 적용 발주 및 공사시행 ‣공사 준공 및 최종보고

Ⅲ		시 행 계 획

□ 추진내용 (*사업예산에 따라 대상지, 시행범위 변동가능)

○ 대상 주차장 : 세종로(시설), 마포유수지(노외), 을지로·청계(노상)

○ 시행범위

- 세종로(지하2층) : 천장·벽체·기둥·바닥 등 도색, 달대형 간판 및 폴사인 설치 등

- 마포유수지(노외) : 주차장 이정표, 주차장 입구 폴사인 설치 등

- 을지로(노상) : 노상 요금안내간판 설치 등

- 청계(노상) : 노상 요금안내간판, 주차부스 이용안내표지 개선 등

○ 개선 디자인 대표예시 (*현장여건에 따라 세부디자인 변동가능)

구 분	개 선 대 상	개 선 예 시	비 고
도로이정표
주차장 입구 폴사인
벽체 및 기둥 디자인
주차장 바닥 (구획, 화살표)			확장형 주차구획 시범설치
달대형 사인
이용 안내판 (노상, 노외)
요금 안내판 (노상, 노외)
주차부스			기존 부스 활용

※ 추가사항 붙임문서(디자인 시안) 참조

□ 발주계획

○ 공영주차장 디자인 표준설계 적용 공사발주

- 소요예산 : 350,000천원

- 예산과목 : 공영주차장,대행사업비,수선유지비,수선유지비(기타수선유지비)

- 계약방법 : 일반경쟁입찰

- 추진기간 : 계약일로부터 2017.12월말까지

○ 공영주차장 디자인 표준설계 적용 도면작성 용역발주

☞ 공영주차장 디자인 표준안 설계의 시공도면 부재에 따른 시행

- 소요예산 : 5,000천원

- 예산과목 : 공영주차장,대행사업비,사무관리비,지급수수료(위탁대행)

- 계약방법 : 일반수의계약

Ⅳ		행 정 사 항

○ 市 계약심사 및 공단 일상감사 의뢰 / 총무처 계약의뢰

○ 도면작성 용역발주 시 부족예산(지급수수료) 타 예산과목 전용

○ `17년 우선적용 후 점진적 확대 적용 예정(‘18년 200백만원 예산신청)

※ 세종로(지하2층) 주차장의 경우,□18년 예산범위내에서 조기에 전층 확대 추진예정

붙	임 : 디자인 시안 1부. 끝.