아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기 의뢰 (방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역)

1. 도로계획과-15721호(2017.11.6.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 “방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역

나. 계  약  자 : ㈜동해기술공사

다. 준공예정일 : (당초) 2017.11.14. → (변경) 2018.01.30.

라. 귀책  소재 : 서울특별시(지체상금 부과여부 : 미부과)

마. 연 기 사 유 : 연기 의뢰서(붙임1) 참조

붙임  1. 용역 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 용역 준공기한 연기 방침서 1부.

3. 합의 각서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	강전남		간선도로계획팀장	한정무		도로계획과장	11/08 하종현
협조자
시행	도로계획과-15848	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8078	/전송	2133-0763	/	ileos@seoul.go.kr	/	대시민공개