문서번호	원무과-19921
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
★주무관	시설팀장		원무과장		서북병원장
차혁진	조선행		정태명		11/14 박찬병
협 조
	간호부장					박영숙A
	간호1과장					임미숙
	서무팀장					박준영
	주무관					김미숙
	주무관					박슬기

서북병원 동관 3층 간호부

사무환경개선 보수공사 추진계획

2017. 11.

서울특별시 서북병원

[원무과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

서북병원 동관 3층 간호부

사무환경개선 보수공사 추진계획

우리 병원 동관 3층 간호부 야간 당직자 휴게실 및 통합간호실 등 시설물 노후에 따른 업무환경을 개선하고자 보수공사를 시행하고자 함

1		공 사 개 요

공 사 명 : 서북병원 동관 3층 간호부 사무환경개선 보수공사

공사기간 : 2017. 11. ~ 2017. 12.(약 1개월)

* 2017. 11. 15. 착공(예정) /2017. 11. 22. 공사완료 후 보완

공사위치 : 동관 3층 물품창고, 야간 휴게실 및 통합회의실 등

공사내용

○ 건축 : 휴게실 및 갱의실 내부 도색, 바닥 모노륨 설치 및 천정텍스 교체

○ 설비 : 통합회의실 전기식 냉난방기 설치 및 기존 천정형 FCU 철거 등

소요예산

○ 총사업비 : 17,500천원(부가세 포함)

○ 예산과목

- 총무과 예산 재배정(사무환경개선)

- 행정지원체계강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

2		추 진 경 위

○ ‘17. 8. 7. : 의료창고 등 긴급 보수 요청(간호부-8898)

- 보수공사 추진 중 시설비 및 공공운영비 등 예산부족으로 지연

○ ‘17. 9. 8. : 사무환경 개선(사업소) 희망부서 공모(시 총무과-32102)

○ ‘17.10.12. : 사무환경 개선 계획에 따른 희망부서 재공모(시 총무과-35618)

○ ‘17.10.19. : 사무환경 개선 재공모 신청(간호부-11487)

○ ‘17.11. 7. : 사무환경 개선 예산 재배정 요청(간호부-12228)

○ ‘17.11.10. : 사무환경개선 예산 재배정 알림(시 총무과-39662)

3		향 후 계 획

○ 도장공사 및 냉난방기 등 시공사인 장인건설(주) 대표 조남금에 수의계약 의뢰하여 시공하고 대가지불

○ 수의계약 사유 : 소액이며, 실내건축 공사 및 기계설비 공사 전문기업으로 준공후 하자담보 및 공사의 품질을 보장하기 위함

따로붙임 : 견적서 2부.  끝.