문서번호	도로포장연구센터-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
협조
	주무관

도로포장 상태 조사·분석 및 동공탐사 추진실적

(‘17.09.01.~09.30.)

2017. 10

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로포장 상태 조사·분석 및 동공탐사 추진실적

□ 보고일시 : 2017.09.01.~09.30.

□ 보고내용

◯ 도로포장 상태 조사·분석

구 분			도로포장 상태 조사·분석					비고
			계획물량 (a)	조사실적		분석실적
				금월	누계(b)	금월	누계
합계		연장(㎞)	2,361.4	193.92	2,579.83	605.02	2,016.94
‘17년도 전수조사		개소	117	23	101	54	71
		연장(㎞)	2,201.4	189.44	2,361.33	564.44	1,806.64 (76.5%)
장기공용성 (LTPP)		개소	113	3	85	15	85
		연장(㎞)	112.91	4.48	218.5	40.58	210.3
	서울형 포장설계법	개소	29		43	1	43
		연장(㎞)	17.8		93.61	4.84	78.02
	맞춤형 고내구성	개소	16		8	3	8
		연장(㎞)	6.54		20.07	6.86	20.70
	저소음· 배수성포장	개소	6		8	4	8
		연장(㎞)	3.73		25.18	13.38	32.64
	예방적 유지보수	개소	62		23	4	23
		연장(㎞)	84.84		75.16	12.77	76.21
	성능보증제 시험시공	개소		2	2	2	2
		연장(㎞)		3.81	3.81	2.06	2.06
	차열성 시험포장	개소		1	1	1	1
		연장(㎞)		0.67	0.67	0.67	0.67

※ ‘17년도 전수조사 계획물량 대비 조사물량이 많은 사유 ⇒ 시·종점 실 조사연장 증가 등

◯ 동공탐사 조사현황

구 분		동공탐사 조사․분석
		계획 물량 (a)	조사실적		분석실적		잔여 물량 (a-b)	계획(9월)		비 고
			금월	누계(b)	금월	누계		조사	분석
1 차 조사 (km)	함몰개연성 높은 구간	230	18.5 (5.1*)	194.9 (40.2*)	62.7	170.6		20	20	* 도로연장 기준
	요청구간	-	0	19.3	0.1	13.2	-	-	-
2 차 조사 (개소)	천 공	135	-	-	15	40	95	35		1,2차조사 완료 : 166km
	발 견	-	-	-	11	30	-	-

※ 핸드형GPR 제척대상 재분류 및 분석 증가로 부진한 천공 개수를 만회하겠음

- 지역별조사현황(‘17.01.01. ~ ’17.09.30.)

지역별 현황
연번	자치구	연장(km)			동공(개소)
		계획	탐사	분석	천공	발견
1	중 구	-	0.76	0.68	1	-
2	동대문구	-	0.90	0.90	4	4
3	성북구	-	0.57	0.57	-	-
4	서초구	-	0.60	0.60	-	-
5	강남구	-	0.08	0.08	-	-
6	송파구	-	7.75	1.75	2	3
7	강동구	-	0.88	0.80	-	-
8	강서구	106.22	81.82	75.82	19	14
9	양천구	111.78	110.14	78.74	14	9
10	영등포구	12.00	9.60	9.60	-	-
11	노원구	-	0.20	0.20	-	-
12	성동구	-	0.90	0.90	-	-
계		230.0	214.2	170.6	40	30

- 장비운용현황(‘17.01.01. ~ ’17.09.30.)

연번	구분	장비운용현황(일)
		함몰개연성 높은 구간	요청구간	함몰연구	기타구간	계
1	동공탐사 자료취득 (차량형 GPR)	23	14	8	-	45
2	천공, 영상촬영	-	5	3	-	8
3	장 비 시 연	-	-	-	6	6
4	장 비 점 검	-	-	-	8	8
5	FWD, 핸드형GPR	-	4	13	-	17