아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	한국산업단지공단 이사장
(경유)
제목	"산업단지 편의시설 확충사업 협약" 변경 요청

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014.12.1일, 2015.10.1일부로 귀 공단과 서울시간 체결한 “산업단지 편의시설 확충사업 원 협약서 및 변경협약서” 제2조 3,4,5,6호 내용을 아래와 같이 변경 요청합니다.

가.변경내용

구분	당초	변경	비고
제2조 3호 부지면적	1,153㎡	1,149㎡
제2조 4호 건축규모	지하3층 지상6층(지하 3층 근린시설, 3∼6층 원룸형 기숙사 (사업추진 과정에서 총사업비 범위내 조정될 수 있음)	지하2층 지상10층(지하 2층~5층 근린시설, 6∼10층 근로자 기숙사) (사업추진 과정에서 총사업비 범위내 조정될 수 있음)
제2조 5호 사업기간	2014. 12. 1. ~ 2017. 11. 30. (36개월간) (근로자복지센터 외 편의시설 등 복합건물 건립사업으로 추진됨에 따라 사업기간 연장 사유 발생시 협의를 통하여 사업기간 별도 조정)	2014. 12. 1. ~ 2020. 7. 31. (68개월간) (근로자복지센터 외 편의시설 등 복합건물 건립사업으로 추진됨에 따라 사업기간 연장 사유 발생시 협의를 통하여 사업기간 별도 조정)
제2조 6호 총사업비	183억원 (국비 20억원, 지방비 163억원) - 기타 편의시설 사업비 포함	199.96억원 (국비 20.45억원, 지방비 179.51억원) - 기타 편의시설 사업비 포함

나. 변경사유

- 기숙사 등 도입을 위한 구조고도화계획 변경 승인, 투자심사 조건부 충족, 관계기관 의견 수렴 등에 따른 건축규모, 사업기간 등 변경

붙임  1. 산업단지 편의시설 확충사업 변경협약서 1부.

2. G밸리 근로자 문화·복지센터 건립 추진현황 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	손영환		신성장정책팀장	한정훈		신성장산업과장	전결 11/16 김선수
협조자
시행	신성장산업과-1759	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 7층(무교동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4837	/전송	02-2133-0881	/		/	대시민공개